문서번호	문화정책과-9478
결재일자	2021. 7. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	종무팀장	문화정책과장		문화본부장
도근호	윤선희	백운석		07/14 유연식
협 조

‘한국기독교역사문화관’ 건립 지원계획

2021. 7.

문 화 본 부

(문화정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

‘한국기독교역사문화관’ 건립 지원계획

한국 근현대사에서 중추적인 역할을 수행한 한국기독교 역사의 체계적인 관리 및 보존·활용을 위해  ‘한국기독교역사문화관’ 건립을 지원하고자 함

Ⅰ		추진배경 및 사업추진 경과

□  추진배경

❍ 한국 근현대사의 중요한 역할을 수행한 기독교 역사기록과 문화유산에 대한 전문적이고 체계적인 관리를 통한 근대 기독교 유산의 보존 및 계승 필요

❍ 복합 문화공간으로 조성하여 지역 내 부족한 문화시설을 확충하고, 다양한 전시 및 체험 프로그램을 제공하여 시민들의 문화 향유 기회 확대 도모

□  그간 사업추진 경과

❍ 한국기독교역사문화관 건립 연구용역 실시(건립위원회)         :  ’12. 4~’13.1.

❍ 한국기독교역사문화관 건립 지원계획(시장방침)          :  ’14.10.20.

※ 기독교역사문화관 건립부지 확보 문제로 사업 장기화

❍ 은평구-한국기독교역사박물관건립위원회 양해각서 체결 :  ’16.8.24.

❍ 은평3지구 편익11용지 실시계획 변경 승인(부지확정)      :  ’19.5.16.

❍ 건립부지(은평3지구 편익11용지) 매입 완료                :  ’21. 1.

❍ 한국기독교역사문화관 건립 타당성 조사 용역 착수     :  ’21. 5.

Ⅱ		사업개요

□  건립개요

❍ 위    치 : 서울시 은평구 진관동 162-13 일원(편익 11-1 부지)

❍ 규    모 : 지하 3층, 지상 5층(총 연면적 : 4,730.26㎡)

❍ 사업주관 : 은평구청(사업시행 : 재단법인 한국기독교역사문화관)

❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년

❍ 주요시설 : 기록보관실, 전시실, 체험실, 아카이브, 다목적실 등

**************************************************

******************************************

□ 연차별 사업비

(단위: 백만원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	합 계
****		*******	*******	*******	*******
*****		*******	*******	*******	*******
***	*******	*******	******	*******	********
****	*******	*******	********	*******	********

□  공간 활용계획(안)

구 분		공간활용 계획	비고
내 용	** ***	**************** *******************************
	** **	***************************************************** ************************************* ****************************************** ********************************************* ************************************* ****************************** ******************************************** ************************************************************

□  사업대상지

은평3지구 내 편익 11-1 부지

Ⅲ		지원계획

□ 지원개요

❍ 지원근거

- 문화체육관광부 종무실 보조사업 운영 지침

- 서울특별시 전통문화 보존·관리 및 육성에 관한 조례 제6조(관광자원화 개발지원) 등

❍ 지원대상 : 은평구(사업시행 : 재단법인 한국기독교역사문화관)

❍ 연차별 지원계획에 따라 예산 편성 후 교부

(단위 : 백만원)

***	***	*****	*****	*****
*****	*******	*******	*******	*******
*****	*******	*******	*******	*******

❍ 보조금 교부절차

① 보조금 교부신청		② 보조금 교부		③ 사업시행		④ 사업감독		⑤ 사업비 정산
은평구→시→문체부		문체부 →시→은평구		(재)기독교 역사문화관		구		기독교역사문화관→구→시→문체부

Ⅳ		행정사항

□ 추진일정

❍ 건립 타당성 및 기본계획수립 용역 및 기본설계  : ’21. 3월 ~ 7월

❍ 서울시 투자심사                               : ’21. 7월 ~ 9월

❍ 국비 및 시비 예산편성                         : ’21. 9월 ~ 12월

❍ 실시설계 및 인허가                            : ’22. 1월 ~

❍ 건립공사 착공 및 준공                         : ’22. 6월 ~ ’24. 4월

❍ 한국기독교역사문화관 개관                     : ’24. 6월

❍ 정산 및 결과보고                              : ’24. 8월.  끝.