문서번호	급수운영과-10259
결재일자	2021. 7. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
차승현		전동근	07/14 최춘근
협조

설계변경 심의회 결과 보고

(대치동 989번지 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사)

2021. 7.

강남수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의회 결과 보고

(대치동 989번지 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사)

“대치동 989번지 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사”에 대하여 신규공정 및 물량변경 등이 발생하여 아래와 같이 심의회를 개최하고 결과를 보고드림

□  공사 개요

□ 공 사 명 : 대치동 989번지 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사

*******************************************

**********************************

****************************************

*******************************************

**************************

*****************************차은희

*****************자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비[장기사용(배급수관)정비-22108]

□  설계변경 사유 및 주요 내용

**********관련규정

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 행정자치부 예규 제67호(2016.10.04.)

제13장 공사계약일반조건 제6절 공사설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정

**********설계변경 시행근거

- 서울시설공단 실정보고 사항

연번	구 분(제목)	주요 변경내용	관 련 근 거
1회	1차 현장실정 검토보고	****************************	급수운영과-6369 (2021.05.06.)
2회	2차 현장실정 검토보고	******************** *****************	급수운영과-7361 (2021.05.24.)
3회	3차 현장실정 검토보고	********* *****************	급수운영과-8296 (2021.06.10.)
4회	4차 현장실정 검토보고	************************	급수운영과-9386 (2021.06.30.)

- 사업소 작업지시 사항

연번	구 분(제목)	주요 변경내용	관 련 근 거
1회	작업지시 (대치동989번지 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사)	******************************** ********************** ************	급수운영과-8586 (2021.06.16.)

**********공사비 변경 검토

연번	제 목	주요 변경 내용	공사비(증감)
1	제경비 변경 (4대보험료 정산 등)	- 건강, 연금, 노인장기, 퇴직공제비 정산 - 하도급발급수수료, 건설기계대여대금 정산 - 산업보전보건관리비 및 환경보전비 정산 - 고재처리비 및 부지임대료 정산 등	***********
2	토 공	- 구간별 실 시공에 따른 물량 반영 등 - 일부구관 작업시간 변경에 따른 실수량 등 반영	***********
3	부 설 공	- 주철직관 부설공 실수량 반영 - 주철이형관 부설공 실수량 반영 - 주름마디스테관 부설공 실수량 반영 - 일부구관 작업시간 변경에 따른 실수량 등 반영	************
4	구조물공	- 원형밸브실 설치공(D80~200) 실수량 반영 - 철개고정장치 나사조임 실수량 반영 - 일부구관 작업시간 변경에 따른 실수량 등 반영	***********
5	부 대 공	- 자재운반비 물량 실정산 - PE휀스 설치 및 철거 물량 실정산 - 교통정리원 작업일수에 따른 실정산 - 작업일수에 따른 실 사용물량 정산 등 반영	***********
6	사급자재	- 구간별 실 시공에 따른 사용수량 반영	***********

□  설계변경 금액

(단위 : 원)

*******************************************************************************************************************************************************************************

□  설계변경 심의위원회 심의 결과

**********공 사 명  :  대치동 989번지 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사

□ 심의일시 : 2021. 7. 14(수), 14:00

□ 심의장소 : 강남수도사업소 4층(급수운영과)

□ 심의의견 : 설계변경 심의 의견을 아래와 같이 제시함

구 분	직 위	심의내용 및 결과		성 명	비고
		심의항목	심의결과
위원장	급수운영과장	물량변동 적정성	***	최춘근
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	급수운영팀장	물량변동 적정성	***	이승우
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	급수관리팀장	물량변동 적정성	***	전동근
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	시설운영팀장	물량변동 적정성	***	김진성
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	시설안전팀장	물량변동 적정성	***	김재영
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성

□  조치계획

**********상기 심의결과를 반영하여 설계변경을 시행하코자 합니다.

붙임: 1. 심의의견서 1부

2. 설계내역서(변경) 1부.

3. 계약금액검증확인서 1부.

4. 현장실정 검토 보고 5부.  끝.