문서번호	빅데이터담당관-6659
결재일자	2021. 7. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		빅데이터기획팀장	빅데이터담당관
김효태		김재봉	07/14 이수재
협조

마이데이터(본인정보 활용 지원) 실증서비스 지원 사업 6월 월간보고

2021. 7.

빅데이터담당관

- 2021년 마이데이터 실증서비스 지원 사업 -

6월 월간보고

□ 6월 사업추진계획 및 추진실적

수행기관	세부사업명	추진계획	추진내용 및 결과	달성도(%)
서울특별시	사업총괄 및 시스템 구성	참여기관간 회의	- 참여기관간 데이터 연계 논의 및 서비스 앱 구성방안 검토	***
		마이데이터 플랫폼 구성	- H/W 사양 및 필요 장비 정리	****
		착수보고회	- K-Data 및 스마트도시정책관 착수보고회 실시	****
한국부동산원	마이데이터 연계	마이데이터 연계를 위한 데이터셋 정의 시스템 연계작업 일정 협의	전자계약정보 마이데이터 제공을 위한 데이터셋 협의 및 정의 완료 마이데이터 담당 부서와 일정 협의중	***
신한은행	데이터 이용 (전세자금대출)	필요 데이터셋 요건정의 및 확정 API 기반 데이터 수신 개발 착수 (보안성 심의 포함)	필요 데이터셋 요건정의 및 협의 진행 中	**
유라클	마이데이터 앱 개발	서비스 운영 환경	- 블록체인 행정서비스 구성 연계 방안 - H/W 및 S/W 필요 목록 파악	****
		마이데이터 플랫폼 연계	- 행안부 사업단 API 분석 - 마이데이터 처리 프로세스	***
		요구사항 분석	- 데이터 보안(구간 암호화) - 서비스(대출, 전입신고) Flow - 앱 메뉴구성 정의	***
㈜에스앤피랩	마이데이터 플랫폼 개발	착수보고	- kdata 착수보고 (완료)	****
		공공마이데이터 연계	- 연계 데이터 확정 - 기존 서비스와 통합을 위한 방안 확정	***
		중계 PDS 구축	- 네트워크 구성 방안 설계 - 네트워크 구성을 위한 H/W 스펙 확정 - 미들웨어 구성	***
		서포터즈 운영 / 홍보	- 서포터즈 운영 기획	***

□ 7월 사업추진계획

서울특별시	o 사업 총괄 관리 o 공공 마이데이터 세트 연계/제공 o 마이데이터 플랫폼 시스템 구성 및 장비 구입
한국부동산원	o 행안부 마이데이터와 전자계약시스템 연계업무 수행 - 전자계약 자료 제공을 위한 연계 클라이언트 설치 일정 협의
신한은행	o 필요 데이터셋 요건 정의 확정 - 공공마이데이터 유통체계 표준화팀과 데이터요건 협의/확정 o API 기반 데이터 수신 개발 - 데이터 요건 확정에 따른 API 수신체계 개발 - 보안성 심의(서울시 이사온서비스와의 연계성 내부 보안 승인 절차)
유라클	o 개발환경 구성 - Web/WAS 설정 및 도메인 세팅 ▪중계PDS / 신한은행 연계 프레임웤 설계 o 마이데이터 플랫폼 연계 데이터 항목 정의 - 사용자 단말 화면 View 제공 데이터 구성 o 앱 서비스 기획 - 서울지갑 앱 內 기존 서비스 메뉴 + 마이데이터 메뉴 재구성 - 개인정보이용권 및 마이데이터 서비스 - 사용자 UI/UX 및 약관관리 항목 - 중계 PDS 연동 API 정의 o 이용기관 연계 데이터 관리 방안 정의 - 서울시 외부 서비스 : 신한은행 대출상품 - 서울시 내부 서비스 : 각 서비스로 전달 또는 행정서비스 관리자 구축 정책
에스앤피랩	o 서울시 이사행정 서비스 ‘이사온’ 서비스 착수보고 - 2021.07.07.(예정) o 서울시 마이데이터 PDS구축 S/W 구현 - 이사온 꾸러미 데이터 중계 프로그램 설계 / 구현 ▪네트워크 구성 / 미들웨어 서버 구성 o 서울시 마이데이터 서비스 홍보를 위한 서포터즈 모집 - 서울시 마이데이터 서비스 홍보 서포터즈 모집 홍보 ▪서포터즈 모집 일정 (2021.07.14. ~ 2021.07.24.) ▪최종 참여 인원 확정 (2021.07.31.)

□ 사업추진계획 대비 실적 부진사유

신한은행	o 필요 데이터셋 요건 정의 확정 - 공공마이데이터 유통체계 표준화팀과 데이터요건 협의/확정 o API 기반 데이터 수신 개발 - 데이터 요건 확정에 따른 API 수신체계 개발 - 보안성 심의(서울시 이사온서비스와의 연계성 내부 보안 승인 절차)
유라클	o 행정안전부 사설인증 및 전입신고 처리 프로세스 정책/기능 협의 중 o 행정안전부 마이데이터 플랫폼 사업단과 신한은행 간 데이터 셋 정의 지연 - 사용자 UI/UX 內 데이터 항목 관련

□ 플랫폼 및 서비스 개발 현황

유라클

*******************

*    - 협의사항

▪ Web Server 블록체인 행정서비스 공통 운영
: 서비스 도메인 별도 구성(xxx.eseoul.go.kr)
********************************************************************
▪ Mydate PDS 서버 별도 구성

▪ 과제 실 운영 기자재 도입 스팩 및 도입 전 개발환경 구성
: 블록체인 행정서비스 WAS 內 볃도 인스턴스 생성 후 행안부 연계 환경 구성

o 사전 업무분석
- 행안부 마이데이터 플랫폼 사업단 기술자료 검토 및 회의
▪ 신한은행 대출 서비스 신청을 위한 데이터 셋 협의
▪ 공공 마이데이터 이용기관 활용 가이드 검토
▪ 공공 마이데이터 시스템 인터페이스 설계서 분석

- 서비스 이용 시 서버 구간 암호화( 솔루션 도입 검토)

▪ 행안부 <-> 서울시 마이데이터 플랫폼 WAS

▪ 서울시 마이데이터 플랫폼 WAS <-> 중계 PDS

▪ 중계 PDS <-> 서울시 이용기관 서비스(신한은행, 청년청 등)

- 수취기관 행안부 API 규격에 따라 대응 필요

-  서울시 마이데이터 관리 주체 정책

▪ 각 서비스별 전송할 것인지?

▪ 블록체인 행정서비스 관리자에서 일괄 관리할지?

(마이데이터 제공 철회 요청 시 프로세스까지 감안 필요)

- 도메인 취득 요청

▪ xxx.eseoul.go.kr

-  신한은행과 데이터셋 협의 완료 사항 요청

- 청년청 데이터 셋 정의

▪ 학자금, 청년수당 정규 세트 신청 해야 할지?

▪ 연동 테스트를 위한 임시 세트 가능 한지?

- 행안부 전입 신고 기능 관련 미팅 요청
▪ 전입신고 기능 구현 전 사설인증 절차 연계 필요
: 공동인증서 구현 제외
: 사설 인증서 연동의 경우 2021년 內 행안부 제공 불가

에스앤피랩

o 서울시 원클릭 이사행정 서비스 ‘이사온’ 착수보고 준비

- ‘이사온’ 서비스 착수 보고 준비 (착수보고 07.07)

▪이사온 서비스 수행 계획 보고

▪이사온 서비스 진행 방안 공유

▪착수보고용 PPT/ 영상 초안 제작

o ‘이사온’ 서비스의 데이터 제공 방안 협의(서울시, 마이데이터 사업단(NIA), 신한은행, 에스앤피랩)

- ‘행안부’ 마이데이터 유통 시스템에 따라 서울시 ‘이사온’ 서비스에서 필요한 공공 마이데이터에 대한 꾸러미 데이터 리뷰

- 서울시 이사온 서비스를 위한 중계 PDS구현 방안 설계

o 중계 PDS 구축

- H/W 스펙 확정 및 네트워크 구성 내용 확정

▪서울시 블록체인 앱과 통합을 위한 네트워크 구성 방안 확정

▪중계 PDS 시나리오 확정 및 S/W 개발 설계

< 착수보고용 ‘이사온’ 영상 기획안 >	< ‘이사온’ 중계 PDS 동작 시나리오>

o 마이데이터 서비스 서포터즈 운영 기획

- 서포터즈 모집 및 홍보 / 교육 기획안 작성