문서번호	설비부-9973
결재일자	2021. 7. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박근형		오삼록	07/15 김호성
협조

『제2자유로 종점부(난지도길)입체화 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

2021. 7.

도시기반시설본부

(설비부)

『제2자유로 종점부(난지도길)입체화 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『제2자유로 종점부(난지도길)입체화 전기공사』관련, 건설사업관리단으로부터 야간조도 개선 요청 민원사항에 대한 실정보고 접수되어 검토보고 함.

Ⅰ		관련근거

□ 야간 조도개선 민원에 따른 보행등 설치 실정보고 [제2자유입건 제2021-228호('21.07.12.)]

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사

□ 위    치 : 마포구 상암동 월드컵 교차로 일대

□ 규    모 : 지하차도 신설(연장 :540m), 도로확폭(연장 : 582m)

□ 계약기간 : *********************

□ 계약금액 : ***************

□ 시 공 사 : *******

□ 건설사업관리단 : **********

□ 공 정 률 : 15%

Ⅲ		실정보고 내용

□ 보행등 설치
○ 서울시 도로조명시설 설치 및 관리지침(보행자 기준조도 : 5lx 이상)에 따라 조도개선 필요

○ 민원 해결사항으로 야간 안전한 통행을 위한 보도구간 보행등 설치 반영

□ 주요 변경내용

○ 도급공사

공 종	주요 변경사항	변경 사유	직접비 (단위:천원)
전기공사	· 보행등 신설 증)4개 · 필름밴드 증)4개 · 폴리에틸렌 난연케이블 증)16m	· 조도개선에 따른 보행등 설치	*******
<직접비 소계>			*******
<제경비 소계>			*******
<도급비>			*******

○ 관급자재

품 명	규 격	수 량(개)	금 액(원)	비 고
가로등기구	LED 50W	4	********************
가로등 부속자재	보행자암, 0.6m	4	********************
<합 계>			********************

□ 건설사업관리인 검토의견

○ 민원 해결사항을 반영한 실정보고 내용(내역서, 산출수량)을 검토한 결과 적정하다고 판단되어, 보행등을 설치하는 것이 타당함.

Ⅳ		보고자의견

□ 책임건설사업관리기술인의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 승인하고, 위 내용에 소요되는 관급자재는 계약부서에 구매 의뢰하고자 함.

붙임 : 감리단 공문 1부.  끝.