“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	도로관리과-14477		주무관	도로관리팀장		도로관리과장		안전교통국장
			조명철	우한상		이한규		07/15 김만호
등록일자	2021.7.15.
결재일자	2021.7.15.
공개구분	부분공개(5)
			협조자		행정국장		양미영
					재무과장		지영애
					계약팀장		한혜란

- 2021년 이면도로 포장공사(연간단가) -

설계변경(제1회) 시행 계획

공사개요

○ 공 사 명: 2021년 이면도로 포장공사(연간단가)

○ 공사기간: 2021. 3. 12.~2021. 12. 31.

○ 도 급 자: ㈜개신건설 대표 정진수

설계변경 사유

○ 작업지시에 따른 공종별 물량 증·감 사항 및 신규공종 반영

○ 공사 실정보고(사토장 변경) 사항 반영

공사비 변경내역                                              (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감		비 고
총공사비	3,688,854,610	3,688,854,610		-
도 급 비	1,717,934,610	2,777,816,710	증)	1,059,882,100
관 급 비	1,433,600,000	657,473,290	감)	776,126,710
이 전 비	537,320,000	253,564,610	감)	283,755,390

조치계획

○ 변경내역 반영하여 설계변경 시행

2021.  7.

	강 남 구
(		도 로 관 리 과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 • 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 현장 실정 검토보고(사토장 변경) • 2021년 이면도로 포장공사(연간단가) 작업지시
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 검토완료
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 일반주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당없음

- 2021년 이면도로 포장공사(연간단가) -

설계변경(제1회) 시행 계획

관내 이면도로의 안전하고 쾌적한 도로 기능 유지관리와 주민 통행 불편사항 해소를 위하여 시행중인 『2021년 이면도로 포장공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회)을 시행코자 함.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명: 2021년 이면도로 포장공사(연간단가)

□ 공사기간: 2021. 3. 12.∼2021. 12. 31.

□ 총공사비: 금3,688,854,610원

○ 도급비 1,717,934,610원, 관급비 1,433,600천원, 이전비 537,320천원

□ 공사개요: 아스콘 표층 포장 326a, 아스콘 중층 포장 40.5a,

보도블록 포장 6.1a, 경계석 및 측구 설치 4,190m 등

□ 도 급 자: ㈜개신건설 대표 정진수

Ⅱ		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

○ 작업지시에 따른 공종별 시공 물량 증·감 및 신규공종 반영

- 아스콘 표층공, L형 측구설치, 도로경계석 설치 등 주요 공종 물량 증·감 반영

- 임시 노면 표시 개선에 따른 임시차선테이프 설치 신규공종 반영

- 민원처리를 위한 신규공종(판석붙임, 탄성포장재 포설 등) 반영

○ 보도블록 포장 관련 서울형품센 폐지에 따른 표준품셈 신규공종 반영

- ’21년 표준품셈 개정에 따른 보도용 블록포장 품 보완·신설로 기존 설계 시 적용한 서울형품셈이 폐지되어 이를 반영하고자 함

○ 공사 실정보고에 따른 사토장 변경 사항 반영

□ 공사비 증·감 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비고
총공사비	3,688,854,610	3,688,854,610		-
도 급 비	1,717,934,610	2,777,816,710	증)	1,059,882,100
관 급 비	1,433,600,000	657,473,290	감)	776,126,710
이 전 비	537,320,000	253,564,610	감)	283,755,390

□ 주요 물량 증·감 내역

공 종	규 격	단위	수 량		증 · 감		비고
			당초	변경
작업지시에 따른 공종별 시공 물량 증·감 및 신규공종 반영
아스콘표층공(인력)	T=5cm	a	200	250	증)	50
L형 측구설치	B=45cm	m	1,600	4,500	증)	2,900
도로경계석 설치	150×150×1000(mm)	m	1,870	3,000	증)	1,130
임시차선테이프 설치	T=5cm	m	-	1,600	증)	1,600	신규
판석붙임(화강석)	T=5cm	㎡	-	150	증)	92	신규
탄성포장재 포설	T=20mm	㎡	-	50	증)	50	신규
보도블록 포장 관련 서울형품센 폐지에 따른 표준품셈 신규공종 반영
보도블록 포장	20×20×8이하(cm)	a	5	0	감)	5
보도블록포장 설치	20×20×8이하(cm)	a	-	5	증)	5	신규
보도블록포장 재설치	20×20×8이하(cm)	a	-	25	증)	25	신규
공사 실정보고에 따른 사토장 변경 사항 반영
잔토처리운반	집하장 → 김포 매립지	㎥	1,775	-	감)	1,775
잔토처리운반	집하장 → 여주 산북면	㎥	-	2,760	증)	2,760	신규

Ⅲ		조치계획

□ 상기 보고내용과 같이 공사추진에 따른 변경사항에 대하여 설계변경  시행하고자 함.

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.