투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사완료 및 시설물 관리사무 위임 [청계천로 자전거 전용도로 설치공사]

1. 관련근거

가. “건설공사 예비준공검사 시행 방법 개선” 기술심사담당관-10083(2018. 6. 28.)

나. “도로 등 시설물 유지관리사무 개선 방안” 도로계획과-17186(2019. 12. 13.)

다. “청계천로 자전거 전용도로 예비준공검사 및 개통대비 합동점검 시행” 토목부-9755(2021. 5.24.)

라. 서울시설공단 청계천관리처-3349(2021. 5.31.), 서부도로사업소 도로보수과-5172(2021. 6. 1.),

서부도로사업소 시설보수과-4675(2021. 6. 1.), 북부도로사업소 시설보수과-4422(2021. 6. 2.),

성동도로사업소 시설보수과-3549(2021. 6. 1.), 종로구 도로과-9150(2021. 5.28.),

종로구 교통행정과-40378(2021. 6. 2.), 성동구 토목과-7876(2021. 6. 7.),

성동구 교통행정과-51986(2021. 6.18.),

마. 자전거정책과-6016, 6017(2021. 6.14.) “안전통로 유지관리 시행요청”

2. 우리시(본부)에서 시행한 「청계천로 자전거 전용도로 설치공사」가 2021. 6. 30. 준공되어 2021. 7. 12.부로 시설물 관리사무 위임(인수인계)합니다.(붙임2 예비준공검사 지적사항 조치결과는 용량축소로 해상도가 낮으니 별도 요청시 E-mail로 송부예정임)

□ 시설공사 예비준공검사 및 시설물 관리사무 위임 개요

○ 2021. 5.27. : 예비준공검사 및 시설물 관리기관 협의

[자전거정책과, 하천관리과(서울시설공단), 서부·북도·성동 도로사업소, 종로·중구·성동·동대문구]

○ 2021. 6. 30. : 유지관리부서 지적사항 조치

○ 2021. 6. 30. : 시설공사 준공

○ 2021. 7.  6. : 준공검사

○ 2021. 7. 12. : 시설물 관리사무 위임(시설물 인수인계)

○ 2021. 7. 20.까지 : 유지관리부서 준공도서 제출(감리단 또는 시공사 방문 제출)

※ 이팝나무 이식(동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서울식물원)은 인수인계 완료

붙임  1. 시설물 관리기관(기관별, 시설물별) 1부.

2. 예비준공검사 지적사항 조치결과 1부.

3. 시설물 준공도서 1부.(별도송부)

4. 준공도서 인수증 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(자전거정책과장),서 울 특 별 시 장(하천관리과장),설비부장,방재시설부장,서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 서부도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 서부도로사업소장(기전과장),서울특별시 북부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 북부도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 북부도로사업소장(기전과장),서울특별시 성동도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 성동도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 성동도로사업소장(기전과장),동부공원녹지사업소장,중부공원녹지사업소장,서울식물원장,서울시설공단이사장,종로구청장(교통행정과),종로구청장(도로과),서울특별시중구청장(도로시설과장),동대문구청장(도로과장),동대문구청장(교통행정과장),성동구청장(교통행정과장),성동구청장(토목과장),성동구청장(공원녹지과장)
주무관	남만조		교량건설과장	장종환		토목부장	07/12 김용제
협조자
시행	토목부-13343	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어 플레이스빌딩12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)