문서번호	토목부-13672
결재일자	2021. 7. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	07/15 代진재섭
협조	주무관		황윤기
	주무관		노순재

설계변경(전체 11회, 9차 1회) 검토보고

【동부간선도로확장공사(1공구) 전면책임감리용역】

2021.07.

도시기반시설본부

토목부

설계 변경(전체 11회, 9차 1회) 검토보고

【동부간선도로확장공사(1공구) 전면책임감리용역】

동부간선도로 확장공사(1공구) 전면책임 감리용역의 효율적인 업무수행을 위해 배치 일정 조정(조경분야 등) 반영하고자 검토 후 보고드림.

※ 관련근거 : 도화(감리) 2021-9890호(2021.07.12.)

1		용역개요

○ 용 역 명 : 동부간선도로확장공사(1공구) 전면책임감리용역

○ 용역규모 : 도로 확장 4차로 → 6차로, 연장 1.45km

○ 용 역 비 : 3,225백만원(9차 : 283백만원)

○ 용역기간 : ‘08.01.02. ～ ’21.07.31.(9차 ‘21.01.01. ∼ ’21.07.31.)

○ 용 역 사 : ㈜도화엔지니어링

2		설계변경 검토

○ 변경내용

구 분		당 초	변 경	증·감(△)	비고
전체 11회	용역비	3,218,470천원	3,225,507천원	증) 7,037천원
	용역기간	‘08.01.02.～‘21.07.31.	‘08.01.02.～‘21.07.31.	-
9차 1회	용역비	282,963천원	290,000천원	증) 7,037천원
	용역기간	‘20.01.29.～‘20.12.31.	‘20.01.29.～‘20.12.31.	-

○ 건설사업관리단 투입 계획 변경 현황

- 전체 11회

구분		투입 인원	당 초 (개월)	변 경 (개월)	증 · 감 (개월)	비고
분야별	토목	1인	64.08	63.58	(△) 0.50	감리사보
	조경	1인	2.00	3.00	1.00	감리사보

- 9차 1회

구분		투입 인원	당 초 (개월)	변 경 (개월)	증 · 감 (개월)	비고
분야별	토목	1인	7.00	6.50	(△) 0.50	감리사보
	조경	1인	1.00	2.00	1.00	감리사보

※ 변경사유 : 조경분야 공정 계획에 따른 투입 일정 변경

3		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 건설사업관리기술자를 투입 일정을 변경하여 건설사업관리업무 수행에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 설계변경 감리 검토 보고서 등 각 1부.  끝.