문서번호	시설보수과-5740
결재일자	2021. 7. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
송준행		이화신	07/16 고영준
협 조
	주무관			오광준
	주무관			이영택
	주무관			김영현
	주무관			김권수

2022년 안전점검용역 계획보고

2021.  07.

북부도로사업소

(시설보수과)

2022년 안전점검용역 계획 보고

우리사업소에서 유지·관리하고 있는 도로시설물 중 2022년 정밀안전진단 및 점검용역 시행 대상 시설물에 대한 계획 보고임.

1		관련근거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 및 같은 법 시행령 제8조

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조 및 같은 법 시행령 제10조

□ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조 2항

□ 정밀안전점검 시행기준 개선사항 안내(기술심사담당관-12064, 2019.6.27.)

2		안전점검 대상 및 예산

□ 점검대상 : 총 38개 도로시설물

구 분			일반 교량	고가 차도	터널	지하 차도	복개 구조	비 고
2022년	정밀안전진단	1	-	-	-	-	1	1종: 1개 시설
	정밀안전점검	37	20	6	3	6	2	1종 : 1개 시설 2종 : 8개 시설 3종 : 3개 시설 종외 : 25개 시설

□ 점검시기 : 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제8조 및 제10조 별표3.

안전 등급	정밀안전점검		정밀안전진단
	건축물	그 외 시설물
A등급	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
B·C등급	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
D·E등급	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

※ ‘시설물안전법’에 따라 1·2종 시설물에 대해 정밀안전진단 및 정밀안전(긴급)점검을 규정하고 있으나, 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조 2항(1·2종 외 시설물을 1·2종 시설물에 준하여 안전점검 실시) 및 정밀안전점검 시행기준 개선사항에 따라 3종 및 법정외 시설물에 대해서도 정밀안전점검을 추진코자 함.

□ 점검시설물 현황 및 예산

구 분	개소	용 역 명	시 설 명	소요예산(천원)
정밀안전진단	1	당현천1복개 정밀안전진단용역	○ 당현천1복개 <1종> (B=20.4~38.7m, L=825m)	*******
정밀안전점검	14	녹천교 등 14개시설 정밀안전점검용역	○교량 13개, 고가 1개시설(강북,도봉,종로) - 2종시설 1개 시설, 법정외 13개 시설 - 교량 : 녹천교, 방학교, 우이3교, 도봉1교, 세검1교, 배오개다리, 새벽다리, 나래교, 버들다리, 오간수교, 맑은내다리, 영도교, 문이교 - 고가 : 빨래골교	*******
	12	화랑고가 등 12개시설 정밀안전점검용역	○ 교량 7개, 고가 5개시설(성북, 노원) - 2종시설 1개 시설, 법정외 11개 시설 - 교량 : 안암2교, 월곡교, 성북3교, 묵동교, 모래말다리,당현2교, 당현3교 - 고가 : 화랑고가, 돈암차도육교, 미아리구름다리, 북악스카이웨이1교, 북악스카이웨이2교	*******
	11	공릉터널 등 11개시설 정밀안전점검용역	○ 터널3개, 지하차도6개, 복개구조 2개 시설 - 1종 1개, 2종 6개, 3종 3개, 법정외 1개 시설 - 터널 : 공릉, 동망봉, 솔샘 - 지하차도 : 녹천, 창동, 하계, 월계, 정릉, 인수봉로 - 복개구조물 : 정릉천2복개, 우이천1복개	*******
총 계	38	********************* *********************		*********

3		’22년 안전점검 시 고려사항

□ 전차(‘20년) 정밀안전점검 시 제시된 자문의견에 대해 검토 필요

○ (화랑고가) 재하시험 및 구조해석 선택과업 실시

- 사용자가 불쾌감을 느끼는 수준 이상으로 진동, 흔들림이 감지됨에 따라 각 형식별(STB,PSCI) 1경간 씩 원인분석 및 안전성 등 검토 필요

4		조치의견

□ 위 제시된 자문의견 등을 ‘22년 점검용역 과업에 포함 시행하여 시설물안전관리에 만전을 기하고자 함.

5		추진일정

□ 기술용역 타당성 심사의뢰 : 2021. 7.

□ 안전점검 용역 계약의뢰 : 2022. 1. ~ 3. (정밀진단 1월, 정밀점검 3월)

안전점검 용역계약 및 착수 : 2022. 3.~ 4.

안전점검 용역완료 : 2022. 12.

붙임 : 1. 점검 및 진단 5개년 계획 1부.

2. 시설물안전법 시행령 제8조 및 제11조 [별표3] 1부.

3. 기술용역 타당성 심사요청서 1부.

4. 설계내역서 1부.  끝.