문서번호	도로관리과-10464
결재일자	2021. 7. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로안전시설팀장	도로관리과장
이병석		신준식	07/16 하현석
협 조

미래초등학교 방음벽 설치 계획 조정

2021. 7.  .

도로관리과

(도로안전시설팀)

미래초등학교 방음벽 설치 계획 조정

구로구 미래초등학교 방음벽 설치 사업은 학교측 민원발생 등으로 구로구 관내 다른 시급한 노후 방음벽 교체사업으로 대체 조정코자 함.

※ 근거 : 구로구『2021년 도로부속물(방음벽)예산 사업 대상지 변경 요청』(’21.7.13)

□ 사업개요

○ 건    명 : 미래 초등학교 앞 방음벽 설치

○ 위    치 : 구로구 새말로 73 미래초등학교(H=6m, L=130m)

○ 사 업 비 : 1,000백만원

□ 추진현황

○ ’21.1.25 : ’21년 도로부속물(방음벽)예산 재배정(도로관리과 → 구로구)

○ ’21.4.01 : 방음벽 설치 취소요청(미래초등학교 → 구로구)

○ ’21.4.09 : 방음벽 설치 수요조사(구로구 → 신도림초외 15개소 등)

○ ’21.7.13 : 방음벽 설치 예산 변경 신청(구로구→도로관리과)

- 사업대상지 : 서서울생활 과학고등학교 및 오류고등학교 방음벽 교체

- 방음벽 설치 예산 재배정 현황

(단위 : 천원)

재배정 기관	사 업 명	재배정액(당해년도)	비 고
구 로 구	미래 초등학교 앞 방음벽 설치	*********	의 원 발의사업

※**************(구로구청 도로과에서 예산변경 관련 시의원과 사전 협의 완료)

□ 검토내용

○ 미래초등학교 운영위원회 및 지역유지, 교직원 등과의 재논의 과정에서

방음벽 설치를 반대하므로 본 사업 예산을 구로구 관내 다른 학교 노후

방음벽 정비에 활용하여 불용을 방지함이 타당

- 반대사유 : 학생들을 가두는 느낌, 학부모 요청으로 다년간 조성 된 수목 제거 반대

사업요청 당시 코로나-19로 인해 구급차 소음이 심했으나 현재 저조

□ 조치계획

○ 구로구『미래초등학교 앞 방음벽 설치』사업을 구로구 관내『오류고등학교 외

1개소(서서울생활과학고) 방음벽 정비』사업으로 변경시행

○ 미래초등학교 앞 방음벽 설치 사업은 예산변경(감배정)승인하고 구로구

관내 오류고등학교외 1개소(서서울생활과학고) 예산 재배정 추진

- 오류고등학교 방음벽 교체(규모 : H=4~6m, L=153m)

- 서서울과학고 방음벽 교체(규모 : H=4~6m, L=162m)

○ 예산 재배정(조정) 변경 계획

(단위 : 천원)

당 초		변 경
사 업 명	재배정액	사 업 명	요 청 액	금 회 조 정 액
합 계	*********	-	-	*********
미래초등학교 앞 방음벽 설치	*********	미래초등학교 앞 방음벽 설치	**********	*
-	-	오류고등학교외 1개소 (서서울생활과학고) 방음벽 교체	*********	*********

- 예산과목 : 도로 및 도로부속물 관리, 방음시설 보수보강, 시설비

□ 향후 추진계획

○ 2021. 7. : 공사 발주(구로구청)

○ 2021.11.  : 공사 완료

《붙 임》 : 구로구 사업계획 변경 요청공문 각 1부.  끝.