문서번호	토목부-13703
결재일자	2021. 7. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
김구		장종환	07/15 代진재섭
협조

준공기한 연기 검토 보고

【개봉고가 성능개선공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 7.

도시기반시설본부

토 목 부

준공기한 연기 검토 보고

【개봉고가 성능개선공사】

철도보호지구내 경인선 철도 횡단 구간 작업 통제기간 등을 반영하여 차수(1차) 공사 준공기한을 연기하고자 보고 드림.

1		공사개요

❍ 위    치 : 구로구 개봉로 68~개봉로 124

❍ 공사규모 : 교량성능개선(DB18→24) 폭 18.9m, 연장 332m

❍ 공사기간 : 2019. 8. 12.~2023. 7. 12.

❍ 도 급 비 : 14,564백만 원(1차: 4,056백만 원)

❍ 시공사/감리사 : ㈜홍익산업개발 외 1 / ㈜유신 외 2

2		추진경위

❍ ’19. 4. 10.	: 공사 시행 요청(교량안전과→도기본)

❍ ’19. 7. 31.	: 공사 계약

❍ ’19. 4. 22.	: 교통통제(광명 방면)

❍ ’20. 4. 23.	: 경인 전차선로 이설 위·수탁 협약 체결

❍ ’20. 7. 27.	: 공사 중단(철거공법 자재 소유권 분쟁 관련)

❍ ’20. 8. 28.	: 공사 재개

❍ ’20. 9. 30.	: 하도급(철거공) 계약기간 만료

❍ ’21. 3. 26.	: 거더(S1~S7, S11~S15) 철거 완료

❍ ’21. 7.  5.	: 철도구간(S9~S10) 슬래브 철거 완료

❍ ’21. 7.	: 철도구간(S8) 슬래브 철거 진행 중

3		준공기한 연기 검토

❍ 준공기한 연기 내용

(단위: 천원)

구 분		도 급 비	공 사 기 간	증⋅감	비고
전 체	당 초	14,564,110	2019. 8. 12. ~2023. 7. 12.
	변 경	14,564,110	2019. 8. 12. ~2023. 7. 12.	-
1차	당 초	4,055,666	2019. 8. 12. ~2021. 7. 31.
	변 경	4,055,666	2019. 8. 12. ~2021. 8. 30.	증) 30일

❍ 연기사유

- 경인선 철도 구간 작업 통제에 따른 준공기한 연기(30일)

❍ 연기 귀책소재 : 계약상대자 책임 없음

❍ 지체상금 부과 : 미부과

4		조치계획

❍ 상기 보고 내용과 같이 준공기한을 연장하여 예정공정에 맞춰 공정 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.