문서번호	도로보수과-6607
결재일자	2021. 7. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
이상구	이화신	07/19 고영준

아스콘 관리시험 결과에 따른 조치계획

『2021년 노후포장도로 정비공사(1구역)

2021. 7.

북부도로사업소

(도로보수과)

아스콘 관리시험 결과에 따른 조치계획

(2021년 노후포장도로 정비공사-1구역)

노후포장도로 정비공사(1구역)에 따른 버스전용도로상의 표층 자재인 아스콘(개질SMA)에 대한 서울시 품질시험소 품질시험 결과 (2회) 시방기준에 미달(입도 10mm)되어 이에 대한 조치계획을 보고드림.

관련근거

○ 책임건설사업관리기술자 품질관리시험 기준미달 보고(경동-2권역(북부)-2021-128호 (2021.7.19.)

○ 서울시품질시험소 총무과-4825호(2021.6.23.)

○ 서울시품질시험소 총무과-5331호(2021.7.12.)

공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 노후포장도로 정비공사(1구역)

○ 공사규모 : 아스콘 절삭후 포장 A=1,001.2a

○ 공사기간 : 2021.4.5. ~ 2021.12.31.

○ 공 사 비 : 3,663백만원(도급비 1,148, 관급비 1,658, 이전비 857)

○ 계약업체 : 대진건설 대표 조규진

아스콘 구매현황

○ 계약건명 : 2021년 노후포장도로 정비공사(1구역)-북부 아스팔트(고내구성) 구매

○ 계 약 자 : 태형기업(주)  대표 김태균

○ 계약방법 : 제한경쟁

○ 계약금액 : 금719,657,400원

○ 계약수량 : 5,894톤(개질SMA 2,947톤, SMA 2,947톤)

품질시험소 시험결과

노선명	포 장 면적(a)	규격	시 험 항 목	기준값	품질시험결과		비고
					1차	2차
도봉로 버스차로 (우이교~ 방학사거리)	6.2	개질SMA PG76-22 1등급	입도 (10mm)	40~55%	57%	65%	체가름기준에안맞음

추진경위

○ ‘21.06.07 : 도봉로(정의여중입구 교차로 외 3개소) 공사 시행(야간)

○ ‘21.06.15 : 품질시험(1차) 의뢰

○ ‘21.06.23 : 아스팔트콘크리트 품질시험 결과(시방기준 미달) 통보

(서울시 품질시험소 ⇒ 북부도로사업소)

○ ‘21.07.02 : 품질시험(2차) 의뢰

○ ‘21.07.12 : 아스팔트콘크리트 품질시험 결과(시방기준 미달) 통보

(서울시 품질시험소 ⇒ 북부도로사업소)

책임건설사업관리 기술자 검토의견

○ 아스팔트 자재 구매계약 특수조건에 의하여 버스전용차로 품질관리시험 기준미달 구간에 대하여 재시공하는 것이 타당하다고 판단됨

조치계획

○ ‘21.06.07일 시공 물량(개질SMA, 6.2a)에 대하여 혹서기가 지난 이후 현장여건에 맞추어 ’21.10.30.일내 조치 완료토록 아스콘 납품업체인 태형기업(주)에 재시공 지시하여 도로 품질향상에 만전을 기하고자 함.

별첨 1. 품질관리시험 기준미달 보고(감리단) 1부.

2. 시험성적서 각1부.  끝.