코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	노원구청장(여가도시과장)
(경유)
제목	노원구 '서울형 도시텃밭 조성' 사업 변경 사항 검토 결과 알림

1. 서울시 도시농업과-3963(2021.3.16.), 노원구 여가도시과-12525(2021.7.6.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 제출하신‘서울형 도시텃밭 조성’사업 변경 사항에 대한 검토 결과를 아래와 같이 안내하오니 검토 결과를 반영하여 사업을 추진하여 주시고 사업 추진 후 분기 보고 및 정산 시 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 텃밭 조성 후 서울시와 도시농업 BI를 표기한 현판을 반드시 설치하여 서울시 도시농업 사업 홍보에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

※ 현판 설치 위치 : 텃밭 조성 시설 입구 권장

가. 건    명 : 노원구‘서울형 도시텃밭 조성’사업 변경 사항 검토

나. 검토내용 : 사업 대상지 및 예산 변경

- 변경 세부 내역

구분	당초			변경			비고
	대상지	면적 (㎡)	예산액 (천원)	대상지	면적 (㎡)	예산액 (천원)
1개소		355	63,500	6개소	331	61,094
옥상텃밭	11단지 경로당	60	40,000	예뜨랑어린이집	55	14,137	승인
	노원미디어지원센터	60
학교텃밭	중평초등학교	100	20,000	공릉중학교	122	9,395	승인
	연지초등학교	100		중계중학교	32	9,376	일부승인
	-	-	-	다연유치원	40	9,386	일부승인
	-	-	-	무지개유치원	20	9,395	일부승인
어린이텃밭	영신어린이집	35	3,500	파란나라어린이집	62	9,405	승인불가

※ 조성 면적 = 텃밭 틀 면적×2

다. 검토결과 : 일부 승인(서류 보완 제출)

- 보조금 교부 당시 승인된 사업 대상지의 개별 사유 발생으로 인한 대상지 변경 요청 사항이므로 변경 사항 승인

(단, 2020년 생태친화형어린이텃밭 조성사업 수혜시설인 파란나라어린이집 제외)

※ 어린이텃밭 : 보육시설 내 텃밭 조성 후 생태프로그램 운영

- 당초 서울형 도시텃밭 조성사업 보조금 교부 당시의 조성 단가 기준을 초과하여 과도하게 높게 책정되는 등 효율적인 예산 운용으로 볼 수 없는 일부 시설(중계중학교·다연유치원·무지개 유치원)의 면적 추가조성·단가 조정 등을 통해 예산 교부 단가 기준에 맞춘 세부계획서를 서울시에 제출하여 시의 승인 후 사업 추진

※ 중계중학교, 다연유치원 : 공릉중학교와 유사한 공정의 노지형 텃밭(학교텃밭) 조성 사업으로 면적단가 조정 필요

※ 무지개 유치원 : 텃밭 틀 면적 단가가 약 68만원으로 면적단가 조정 필요

※ 조성단가 상한액 : 서울형 도시텃밭 조성사업 중 면적단가가 가장 높은 옥상텃밭 조성 단가(37만원/㎡) 기준

붙임 : 1. 도시텃밭 조성시설 현판 예시·디자인 파일·설치사례 각 1부
2. 서울형 도시텃밭 조성사업 기본계획 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
★주무관							강명희			도시농업조성팀장					김형금					도시농업과장					07/19 김광덕
협조자
시행			도시농업과-10194									(						)		접수											(						)
우	04514					서울특별시 중구 서소문로 124 씨티스퀘어 18층 도시농업과															/
전화		02-2133-5397						/전송			02-768-8945					/	gangmaeng@seoul.go.kr												/	부분공개(5)