문서번호	치수과-4763
결재일자	2021. 7. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수과장	시설부장
전조연		최연호	07/20 박상보
협조

「한강 준설(저수로, 상수원) 정비공사」

실정보고 (수상운반거리 조정) 사항 검토보고

2021. 7.

한강사업본부

(치수과)

『한강 준설(저수로, 상수원) 정비공사』

실정보고 (수상운반거리 조정) 사항 검토보고

건설사업관리자로부터 한강 준설 정비공사의 수상운반거리 현장여건을 반영한 실정보고에 대한 검토 보고 임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 한강 준설(저수로) 정비공사 외 1

○ 공사규모 : 준설 및 반출 60,300㎥

- 저수로 정비(44,600㎥), 상수원 정비(15,700㎥)

○ 공사기간 : 2021.4. ~ 12.31.

○ 공 사 비 : 2,607백만원 (국비, 시비)

- 저수로 정비 : 1,800백만원 (도급비 1,341백만원, 이전비 459백만원) - 시비

- 상수원 정비 :   807백만원 (도급비    660백만원, 이전비 147백만원) - 국비

○ 도 급 자 : 관악산업(주)-저수로 정비, 유호산업개발(주)-상수원 정비

○ 건설사업관리 : ㈜글로벌건설이엔지

□ 실정보고 개요

○ 관련문서 [글로벌건설이엔지-GEC21감리07-10호(2021.7.8.),-12호(2021.7.9.)]

- 기술검토의견서 : 수상운반거리 변경 실정보고에 대한 검토의견서 제출

○ 실정보고 내용

- 공사 발주시 설계상 오류로 인해 시공사 현장별 일부 공종 중 준설지역과 임시야적장간의 수상운반거리가 설계도서와 실제 운반거리가 잘못 적용되어 있음

▸ 수상운반거리 변경 내용

공사명	공 종	준설량 (㎥)	운반거리(㎞)			비 고
			당 초	변 경	추가거리
저수로 준설	수상택시 당산승강장	4,000	8.75	12.51	3.76
	수상택시 잠실승강장	5,000	8.75	29.57	20.82
상수원 준설	강북취수장 앞 준설공	2,800	4.71	13.01	8.30

▸ 계약금액 변경 내역                                        (단위 : 천원)

공사명	공 종	준설량 (㎥)	당 초	변 경	증 ‧ 감	비 고
저수로 준설	수상택시 당산승강장	4,000	10,577	30,031	19,454
	수상택시 잠실승강장	5,000	13,222	68,320	55,098
	계				74,552
상수원 준설	강북취수장 앞 준설공	2,800	6,658	22,959	16,301
	계				16,301

※ 추가된 운반거리는 변경당시의 품셈을 기준으로 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한단가 적용

(관련근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제7절 실비산정)

□ 검토의견

○ 건설사업관리자의 실정보고사항은 설계상 오류로 인한 수상운반거리를 실제 운반거리로 변경하는 건으로서 건설사업관리자의 의견과 같이 변경함이 타당한 것으로 사료됨.

※ 원 설계자 의견 : 설계서 작성시 수상운반거리 오기 사항으로 실제 원거리로 적용 필요

□ 조치계획

○「한강준설 감독권한대행 건설사업관리자」에게 상기 검토내용과 같이 수상운반거리 조정토록 실정보고 승인 처리하고,

○ 소요예산 증액분에 대해서는 집행잔액 등을 활용하여 향후 설계변경시 반영토록 조치코자 함.

붙임 : 실정보고 각1부.  끝.