문서번호	시설관리과-12844
결재일자	2021. 7. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
조광희	조규환	07/21 이태형
협 조

「미아동699-31 ~698-29 외7개소 장기사용배급수관 정비공사」

현  장  실  정  보  고

2021. 7.

현  장  실  정  보  고

『미아동699-31 ~ 698-29 외7개소 장기사용배급수관 정비공사』와 관련하여 감독업무 수행중인 서울시설공단으로부터 현장실정보고서(중간집하장, 사토장 변경)가 제출되어 검토결과를 보고드림.

□ 추진근거

○ 현장실정 보고서 제출 *********************************

□ 공사현황

○ 공 사 명 : *************************************

○ 공사개요 : **************************

○ 공사기간 : *************************

○ 도 급 비 : ************

○ 도 급 자 : *************

□ 보고내용

가. 중간집하장 변경

○ 당초 설계는 중간집하장 위치가 공사현장 반경 3Km로 지장되었으나, 현장 반경 3Km이내에는 적합한 중간집하장 부지를 찾을 수 없어 변경이 필요한 실정임.

○ 중간집하장 : 당초 3Km → 변경 12.0Km (남양주시 별내동 산8)

○ 위치도(운반거리) 및 현장사진

번동 305-6 별내동 산8
위치도(운반거리)	현장사진

○ 중간집하장 위치가 공사현장 반경(3Km) 위치에서 변경 중간집하장까지 최적 운반거리(12Km)를 적용하고 실제 시공물량을 설계변경(정산)시 반영하는 것이 타당함.

○ 계략공사비 : 증)9,317천원

나. 사토장 변경

○ 당초 설계는 현장에서 발생된 잔토의 처리는 수도권 매립지로 설계되었으나, 수도권 매립지 토사반입 불가(반입 불가사유 : 부적합 토사)로 인하여 잔토처리가 가능한 사토장으로 변경이 필요한 실정임.

※ 관련근거 : 토사 반입불가 회신 [ 매립부-1710호(2021.07.01.) ]

○ 신규 사토장 : 당초 67.8Km → 변경 42.4Km (양천군 옥천면 옥천리 299-1)

○ 위치도(운반거리) 및 현장사진

별내동 산8 옥천리 299-1
위치도(운반거리)	현장사진

○ 신규 사토장 확인결과 사토장으로 사용 가능한 부지면적을 확보하고 있으며, 개발행위허가증, 진출입로, 토사반입 동의서 등 사토장으로 사용하기 적정한 곳으로 판단됨.

○ 중간집하장에서 변경 사토장까지 최적 운반거리(42.4Km)를 적용하고 실제 시공물량을 설계변경(정산)시 반영하는 것이 타당함.

○ 계략공사비 : 감)4,378천원

□ 검토결과

○ 서울시설공단에서 제출한 현장 실정보고(중간집하장, 사토장 변경)에 대하여 검토한 결과 상기 보고내용과 같이 적정하므로 이를 감독부서인 서울시설공단에 승인 통보하여 시행토록 하고, 추후 설계변경시 정산하여 반영처리코자 합니다.

붙임  1. 토사 반입불가 회신 공문 1부.

2. 현장실정 검토보고 1부.  끝.