더 가까운 이웃 더 편안한 동네, 행복성북
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	설계변경(제2회) 시행[2021년 관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)]

우리 구에서 시행중인 「2021년 관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)」에 대하여 아래와 같이 제2회 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2021년 관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2021. 3. 11. ~ 12. 31.

다. 도 급 자 : 인효건설(주) 대표 안효진

라. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ㆍ 감		비 고
총 공 사 비	*************	*************	**	***********
도 급 비	919,841,950	1,323,516,000	증)	403,674,050
관 급 비	***********	***********	**	**********
이 전 비	***********	***********	**	**********

마. 설계변경 사유 : 시공물량 증·감 및 신규공종 발생 등(별첨)

바. 예산과목

○  치수과, 하천 및 하수시설 정비, 하수시설 개량 확충, 하수시설물 보수공사,  시설비 및 부대비, 시설비 : 증)460,000,000원 – 구비(명시이월)

붙임  1. 설계변경(제1회) 사유서 1부.

2. 설계변경(제1회) 내역서 1부.

3. 제비율 검증표 1부.

4. 일상감사결과 1부.

5. 관련공문(방침서) 1부.  끝.

주무관							박인선				빗물관리담당					정무홍					치수과장					김윤기					건설교통국장						07/21 임승락
협조자				주무관							염승현					계약담당							신정경					재무과장								代손영희
시행			치수과-12074										(						)		접수												(						)
우	02848					서울특별시 성북구 보문로 168 치수과(10층) (삼선동5가)																/			http://www.sb.go.kr
전화		02-2241-3653							/전송			02-2241-6563					/	inlinee@sb.go.kr													/	부분공개(5)