투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 폐기물처리용역(건설폐기물, 혼합폐기물) 변경계약 의뢰

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 폐기물처리용역(건설폐기물, 혼합폐기물)과 관련하여 변경계약을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

구 분		중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역	건설폐기물처리용역(혼합폐기물)
계약사		정일산업(주) (대표: 박상만)	㈜이도 (대표: 최정훈)
용역비		총차 : 221,612,900원 2차 : 106,981,900원	총차 : 1,886,720,000원 2차 : 665,355,000원
용역 기간	총괄	2017.10.01.∼2021.07.20.	2018.08.13.∼2021.07.20.
	2차	2020.03.01.∼2021.07.20.	2020.03.31.∼2021.07.20.

나. 변경사유 : 공사준공에 따른 폐기물 물량 정산

다. 변경내역

(단위 ; 원)

구 분		중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역	건설폐기물처리용역(혼합폐기물)	비 고
계약사		정일산업(주) (대표: 박상만)	㈜이도 (대표: 최정훈)
용역비	총차	당초 : 221,612,900원 변경 : 211,300,000원 증감 : △10,312,900원	당초 : 1,886,720,000원 변경 : 1,863,200,000원 증감 : △23,520,000원
	2차	당초 : 106,981,900원 변경 : 96,669,000원 증감 : △10,312,900원	당초 : 665,355,000원 변경 : 641,835,000원 증감 : △23,520,000원
용역 기간		총차: 2017.10.01.∼2021.07.20. 2차: 2020.03.01.∼2021.07.20.	총차: 2018.08.13.∼2021.07.20. 2차: 2020.03.01.∼2021.07.20.	변경 없음

라. 예산과목 : (공기업하수도사업특별회계) 물순환안전관, 물재생시설과, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비 및 부대비, 시설비, 물재생시설개선, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치

붙임   1. 방침서 1부.

2. 내역서 각 1부

3. 합의각서 각 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	유시혁		환경시설과장	代최종구		방재시설부장	07/16 박홍봉
협조자
시행	방재시설부-9475	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5 7)