투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	동부(1공구) 전면책임감리용역(전체 11회, 9차 1회) 변경 계약 의뢰

우리 부에서 시행중인 『동부간선도로 확장공사(1공구) 전면책임감리용역』에 대해 아래와 같이 설계 변경(전체 11회, 9차 1회) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 동부간선도로 확장공사(1공구) 전면책임감리용역

나. 용 역 비 : 3,218백만원(9차 : 282백만원)

다. 용역기간 : ‘08.01.02.∼’21.07.31.(9차 : ‘21.01.01.~’21.07.31.)

라. 용역업체 : ㈜도화엔지니어링

마. 예산과목 : 도로계획과, 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계),

동부간선도로 확장(월계1교~녹천교), 시설비및부대비, 감리비

바. 설계변경 및 용역기간 연장

구 분		당 초	변 경	증·감(△)	비고
전체 11회	용역비	***********	***********	**********
	용역기간	*********************	*********************	*
9차 1회	용역비	*********	*********	**********
	용역기간	*********************	*********************	*

사. 설계변경 사유

- 조경분야 공정 계획에 따른 투입 일정 변경

붙임  설계변경 방침서 및 감리검토 의견서 각 1부.  끝.

	토목부장
주무관	권해엽		교량건설과장	代황윤기		토목부장	07/16 김용제
협조자	주무관	노순재		주무관	황윤기
시행	토목부-13844	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)