투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강산건설(주)
(경유)
제목	공기연장으로 인한 계약금액 조정 신청 회신(동부1공구)

1. 강건토목 제2021-157호(2021.07.07.)와 관련입니다.

2. 요청하신 공기 연장으로 인한 계약금액 조정 신청을 검토한 결과 아래와 같이 계약금액 조정 대상이 아닌 것으로 검토되었음을 알려드립니다.

가. 검토결과

1) 공사비 증액에 따른 간접비 검토

구분	공사비	공사기간	간접비	간접비 증액	비고
당초	10,000백만원	20.01.31.~20.12.31.	807백만원
변경	17,177백만원	20.01.31.~21.07.15.	1,553백만원	(증)746백만원

2) 시공사 조정 요청 금액 : 355백만원

3) 검토결과

- 공사비 증액으로 인한 추가 지급 간접비(746백만원)가 실제 사용된 간접비(355백만원)보다 많은 상황으로 계약금액 조정 대상 아님.

붙임  건설사업관리단 검토의견 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	권해엽		교량건설과장	代황윤기		토목부장	07/16 김용제
협조자	주무관	노순재		주무관	황윤기
시행	토목부-13845	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)