투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 계약 의뢰[개봉고가 성능개선공사]

우리 본부에서 시행 중인『개봉고가 성능개선공사』에 대하여 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명: 개봉고가 성능개선공사

2. 공사규모: 교량 성능개선(DB18→DB24), 폭 18.9m, 연장 332m

3. 도 급 자: ㈜홍익산업개발 외 1개사

4. 준공기한 연기 내용

구 분		당 초	변 경	증･감	비고
도 급 비	전체	14,564,110,000	14,564,110,000	-
	차수(1차)	4,055,666,000	4,055,666,000	-
공사기간	전체	2019. 8. 12. ~ 2023. 7. 12.	2019. 8. 12. ~ 2023. 7. 12.	-
	차수(1차)	2019. 8. 12. ~ 2021. 7. 31.	2019. 8. 12. ~ 2021. 8. 30.	증) 30일

5. 연기사유

- 경인선 철도구간 작업 통제에 따른 준공기한 연기(30일)

6. 연기 귀책소재: 계약상대자 책임 없음

7. 지체상금 부과: 미부과

8. 예산과목: 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리(도시개발특별회계)

중차량노선 시설물 성능개선, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김구		교량건설과장	代황윤기		토목부장	07/16 김용제
협조자
시행	토목부-13847	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8664	/전송	02-3708-2599	/	neuf@seoul.go.kr	/	부분공개(5)