문서번호	거점성장추진단-9892
결재일자	2021. 7. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
실무사무관	애니타운팀장	산업거점정책팀장	거점성장추진단장		경제정책실장
임형준	김성미	김정안	박대우		07/16 김의승
협 조
	건축부장			이창구

서울애니메이션센터 재건축 설계용역 추진계획

2021.7.

경제정책실

(거점성장추진단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서울애니메이션센터 재건축 설계용역 추진계획

서울애니메이션센터 재건축 사업부지 매장문화재 확대 보존 등을 위한 설계용역 사전절차가 완료됨에 따라, ‘터’의 역사성과 애니센터의 미래 지향성이 조화된 재건축 사업 보완 설계를 위한 용역을 추진하고자 함

1		재건축 사업개요

□ 사업개요

○ 위    치 : 중구 소파로 126 일원(부지 8,473㎡)

○ 규    모 : 연면적 15,930㎡, 지하4층 ~ 지상3층

※ 역사문화미관지구, 자연경관지구, 최고고도지구(최대3층, 높이 12m), 건폐율 30%, 용적률 150% 이하

○ 공간구성 : 창작(기업입주) + 유통(전시/컨퍼런스/극장) + 놀이(체험)가 공존하는 공간

○ 사업기간 : ’16.5.~’25.9. (총사업비 : 75,451백만원)

○ 추진현황 : 기본계획(’15.10.) → 설계공모․설계(’16.8.~’19.8.) → 철거(’18.12.~’19.5.) → 문화재 발굴․심의(’18.12.~’19.8.) → 타당성재조사(’20.4.~’20.10.) → 투자재심사(’21.3.) → 공유재산재심의(’21.5.) 및 공유재산관리계획 의결(’21.6.)

≪설계용역 사전절차 완료≫

- ’21.4.	: 기술용역타당성심사(기술심사담당관)

- ’21.7.	: 건설기술심의(기술심사담당관)

- ’21.7.	: 일상감사(감사담당관)

****************************

******

***********************

***********************************************

*******************

************************************************************

2		설계용역 추진계획

□ 설계용역 개요

○ 용 역 명 : 서울애니메이션센터 설계용역

○ 용역기간 : ’21.7.~’22.7.(착수일로부터 360일)

○ 과업범위 : 대지 8,473㎡, 연면적 15,930㎡(지하4층/지상3층)

- 서울애니메이션센터 신축공사 및 문화재 이전보존 설계

○ 주요 과업내용

- 서울애니메이션센터 신축공사 계획설계, 중간설계 및 실시설계

- 신축공사 설계관련 에너지효율등급 인증 등 각종 인증 취득

- 신축공사 및 문화재보존 설계관련 건설기술심의 등 각종 심의 수행

****************************

*********************

***********

*********************************************************

*********************************************************************************************************************************

*************

*****************************************************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************

******************************************

***************************************************************

*****************************************************************

********************

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************

***************

*******************************************

********************************************

*******************************************

붙 임 1. 일상감사 의견서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 용역원가계산서 1부.

4. 용역원가계산서(전면 재설계) 1부.

5. 최근 3년간 건설업노임 현황 1부.  끝.