투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	『슬러지1처리장 냉난방기 구매』계약기간 변경 요청

1. 관리과-5250(2021.6.21.)호 및 와 관련 입니다.

2.『슬러지1처리장 냉난방기 구매』와 관련하여 계약기간을 아래과 같이 변경 요청합니다.

가. 건    명 : 슬러지1처리장 냉난방기 구매

나. 계약금액 : 금4,614,780원

다. 계약업체 : ㈜세원센추리 대표 원종순

라. 변경내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
계약기간	2021. 6. 21. ~ 2021. 7. 21	2021. 6. 1. ~ 2021. 8. 21

마. 변경사유 : 냉난방기 용량 변경에 따른 전기공사 등 추가작업 일정발생

붙임 :  1. 납품기한 연기요청 공문 1부.

2. 납품기한 연기원 1부.  끝.

	운영과장
주무관	최승호		주무관	이진호		운영과장	07/19 한상각
협조자
시행	운영과-1468	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동) 서울특별시난지물재생센터 운영과	/
전화	02-300-8543	/전송	02-300-8544	/	viento01@seoul.go.kr	/	대시민공개