문서번호	기전설비과-4369
결재일자	2021. 7. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김효준		代이균형	07/21 박상보
협조

2021년 한강공원 승강기 유지관리용역 계약변경 검토보고(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 7.

한강사업본부

(기전설비과)

2021년 한강공원

승강기 유지관리용역 계약변경 검토보고

「2021년 한강공원 승강기 유지관리 용역」과 관련하여 당초 계약대비 물량 변동사항에 대해 계약변경하여, 정산처리하고자 함.

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 2021년 한강공원 승강기 유지관리 용역

□ 용역업체 : ****************

□ 계약금액 : 금148,856,880원

□ 계약기간 : 2021.1.1.~2021.12.31.

□ 용역내용 : 승강기 27개소 39대 점검·보수

□ 변경내용

□ 변경사유 : 승강기 단가부품 사용물량 추가에 따른 재료비 증액

□ 예산변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
총용역비	148,856,880	168,094,960	증)19,238,080
승강기 정기점검	81,454,405	81,454,405	-
단가계약	50,079,832	66,195,165	증)16,115,333
일반관리비	2,003,193	2,647,807	증)644,614
이윤	1,787,013	2,516,223	증)729,210
부가세	13,532,437	15,281,360	증)1,748,923

□ 향후계획

□ ’21.7. 설계변경 의뢰 및 기성금(2차) 지급

붙임 :  1. 변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝