투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	용역 중지 통보 [광화문역 연결 지하보행 네트워크 조성사업 기본 및 실시설계용역]

1. 토목부-14027호(2021.7.20.)와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행중인 「광화문역 연결 지하보행 네트워크 조성사업 기본 및 실시설계용역」의 용역 중지에 대해 검토하고, 그 결과를 통보합니다.

가. 용 역 명 : 광화문역 연결 지하보행 네트워크 조성사업 기본 및 실시설계용역

나. 용역기간 : '20. 9. 18. ~ '21. 9. 17.

다. 용역금액 : 405,955천원

라. 중지기간 : '21. 7. 26.~ 별도 통보시까지

마. 중지사유 : 도시계획시설 선형 및 굴착공법 변경에 따른 예산 증액(약 70억원)이 불가피하여, 투자 재심사(기존 사업비 대비 30% 이상)를 거쳐야 하므로 투자 재심사 완료('21.9.예정)시까지 기본 및 실시설계 용역 일시 중지

붙임  관련방침 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	총무부장,(주)삼안
★주무관	홍현기		토목설계과장	代박희정		토목부장	07/21 임춘근
협조자
시행	토목부-14091	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2587	/전송	768-8905	/	hkhong80@seoul.go.kr	/	부분공개(5)