문서번호	건축부-11416
결재일자	2021. 7. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경시설과장	건축부장
고병연	정채문	07/22 신명승

『G밸리 근로자문화복지센터 건립공사』

물가변동 계약금액 조정(4회) 검토 보고

2021.  07.

도시기반시설본부

【 건 축 부 】

「G밸리 근로자문화복지센터 건립공사」

물가변동 계약금액 조정(4회) 검토 보고

『G밸리 근로자문화복지센터 건립공사』관련 물가변동에 의한 계약금액 조정(4회)  전문가 자문결과 반영하여 검토 결과를 보고 드림

1		공사개요

○ 공 사 명 : G밸리 근로자문화복지센터 건립공사

○ 공사개요 : 지하2층, 지상10층, 연면적 6,017㎡

○ 공사기간 : ’18. 03. 02. ~ ’21. 09. 30.

○ 계약금액 : 7,343,277천원(총차)/ 5,352,646천원(2차)

○ 시 공 자 : 주계약자(종합,건축공사업)-예강건설산업(주)

부계약자-(주)한웅이앤씨(토공), (주)국민에코(비계)

○ 감 리 자 : (주)펨코엔지니어링건축사사무소 외 1개사

2		계약금액 조정(물가변동) 사유

○ 관련 근거

- 물가변동으로 인한 계약금액 조정 보고서 제출” [예강 G밸리 2020-10-30]

-「지방계약법」제22조, 동법 시행령 제73조 및 동법 시행규칙 제72조

-「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」공사계약 일반조건 제22조

○ 계약금액 조정 사유 : 물가변동으로 인한 계약금액 조정

○ 추진경위

- ’20.11.06  : 물가변동 계약금액 조정(1회) 검토 보고 처리(건축부-18836)

· 물가변동 조정 금액 : 140,344천원

- ’20.11.24. : 물가변동으로(2회) 검토보고 (CM단→건축부)

- ’20.12.23  : 물가변동 계약금액 조정(2회) 검토 보고 처리(건축부-22005)

· 물가변동 조정 금액 : 154,981천원

- ’21.02.03  : 물가변동으로(3회) 인한 계약금액 조정 검토보고(CM단→건축부)

- ’21.03.08  : 물가변동(3회) 계약금액 조정 검토 보고

· 물가변동 조정 금액 : 159,144천원

- ’21.07.07  : 물가변동(4회) 계약금액 조정 외부전문가 자문회의 개최

3		계약금액 조정내용

○ 계약금액 조정요건 검토

구 분	조정요건	검토결과	적정여부
******	********* ************	******************* *************************** *************************** **************	**
******	*************************	**************	**
*******	************	****************** *********************************	**

○ 물가변동(4차) 증가금액 : 100,670,000원

구 분		검 토 내 용	비 고
************		**************
****************		**************	********
*****************	*****	******	********* ************************* *******************************
	*****	******	******************
	*****	******	*************** ********************** ************************ ************************ ******************
***********		**************	***
************		*****	*************
***********		************	*************
**********		***********	************************************
****************		************

- 사후정산 해당 비목은 물가변동 계약금액 조정 대상에서 제외함

: 건강보험료, 노인장기요양보험료, 연금보험료, 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비,

환경보전비, 건설기계대여금 지급보증수수료, 하도급대금지급보증서발급수수료

○ 자문위원 의견 : 적정함

-  ************************************************

- ************

· ********************************************** ******************

·『**************************************    *****************************************

※ ********************************************* ************************************************************

4		책임건설사업관리기술자 검토의견

○*************************************

***********************

○ ********************************************************************

○ ******************************

5		처리의견

○ ********************************** *********************************************

붙임 : 1. 물가변동으로 인한 계약금액 조정(4차) 자문회의 개최 검토 보고 1부.

2. 외부전문 자문의견서 1부.

3. 물가변동으로 인한 계약금액 조정(4차) 외부전문가 자문결과  반영 검토 보고 1부.  끝.