문서번호	박물관과-7913
결재일자	2021. 7. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		박물관사업팀장	박물관과장
공은형		代조정훈	07/22 이성은
협조

통합수장고 소규모 환경및재해영향평가 용역

계약기간 연장계획

2021. 7.

통합수장고 소규모 환경및재해영향평가 용역

계약기간 연장계획

「통합수장고 소규모 환경및재해영향평가 용역」관련 원주지방환경청과 협의기간 부족에 따라 과업기간을 연장하고자 함

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 서울시 통합수장고 소규모 환경및재해영향평가 용역

○ 계약기간 : **************************

○ 계약금액 : ************

○ 용역업체 : ****************

□ 계약 변경

○ 계약기간 연장

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	**********************	************************	****
계약금액	***********	*****

※ 귀책사유가 서울시에 있어 용역업체에 지체상금 미부과

○ 연장사유

- *************************************************************

□ 향후 계획

○ ’21. 7.	: 재무과 계약변경(기간연장) 의뢰

○ ’21. 9. 24.	: 용역준공

붙임 : 1. 용역사 관련 공문 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.