문서번호	기전과-6222
결재일자	2021. 7. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
조소현		김해중	07/23 석대창
협조

[영등포역 고가 가로등 개선공사]

설계변경 검토 보고

2021. 7.

남부도로사업소

(기 전 과)

[영등포역 고가 가로등 개선공사]

설계변경 검토 보고

영등포역 고가 가로등 개선공사 완료에 따라 제경비 정산 및 실제 시공물량 증∙감 반영하여 설계변경 시행코자 함.

▢ 추진근거

❍ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령

- 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

❍ 영등포역 고가 가로등 개선공사 실정보고 검토보고 [기전과-5747호, 2021.7.8.]

▢ 공사개요

❍ 공 사 명 : 영등포역 고가 가로등 개선공사

❍ 계 약 자 : *****************

❍ 공사기간 : 2021. 3. 29. ~ 2021. 8 .13.

❍ 계약금액 : ******************************

▢ 설계변경 내역

❍ 주요 설계변경 내역

공 종	규 격	수 량		단 위	증/감	비고
		전	후
교통 정리	신호수(주간)	4	5	인	증1
	신호수(야간)	2	3	인	증1
철도운행 안전관리자		0	4	인	증4
열차감시원	야간	0	2	인	증2

❍ 제경비 정산 및 시공물량 내역조정 : 설계변경 내역서 참조

❍ 설계변경 금액

구 분	당초 계약금액(원)	변경 계약금액(원)	증/ 감액	비고
***	**********	**********	**********

⇒ 제경비 실제 정산내역 반영으로 도급비 감액

▢ 보고자 의견

❍ 공사 완료에 따른 작업물량 증∙감 반영 및 제경비(산업안전보건관리비 등) 실제 정산내역을 반영 하여 설계변경 시행함이 타당하며,

❍ 설계변경 후 공사 완료분에 대하여 공사비를 지급하고자 함.

▢ 향후계획

❍ 2021. 7. 26.    설계변경 시행

❍ 2021. 7. 30.    공사 준공

붙임  설계변경 내역서 1부.  끝.