문서번호	교량안전과-11650
결재일자	2021. 7. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이상문		강천수	07/23 조현석
협조

- 한남대교 보수공사 (장기계속 3차) -

설계변경 (전체4회, 3차 2회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 7.

한남대교 보수공사 (장기계속 3차)

설계변경(전체4회, 3차 2회) 검토보고

한남대교 보수공사(장기계약-3차)에 대하여 건설사업관리단으로부터

설계변경 보고서가 제출되어 검토하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		근 거

□ 설계변경(제2회) 검토의견서 제출(한남대교 보수공사-장기계속)

(한강교량감 2021-4468호, 2021.07.21.)

□ 사업계획 변경 검토 보고(교량안전과-6750호, ’21.04.28.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 한남대교 보수공사(장기계속)

□ 공사기간 : `18.03.23 ~ `21.07.30.(3차 `21.07.30.)

□ 공사규모 : 상류교 교각(25기) 보수․보강(3차 11기)

□ 사 업 비 : 5,252백만원(3차 1,631백만원)

(단위:원)

구 분	******	*****	비 고
총공사비	*************	*************
도 급 비	*************	*************
관 급 비	***********	**********
이 전 비	**********	*********

□ 시 공 사 : ㈜ 미래씨앤알 외 1

□ 건설사업감리단 : ㈜ 동명기술공단

Ⅲ		설계변경 주요내용

가. 설계변경 주요사항

□ P19 교각 단면 보수면적 실제 시공 물량 반영

○ 교각 단면 손상부 실제 시공 및 검측 물량 반영

□ P2 코핑부 단면 보강 방법 변경

○ 당초 : 코핑부 측면 50cm 확대 → 변경 : 하부 110m 확대

□ 기타 고용개선지원비 등

○ 고용개선지원비, 전자인력관리시스템단말기 비용 반영

나. 수량 및 공사비 변경 내역

□ 주요 공종별 수량 증․감 현황

구 분		단위	주요 수량			변경 사유	비고
			당초	변경	증·감
1.가시설 구조물 제작설치 및 해체		ton	-	4.638	4.638	- 동바리 공법 → 매달기 공법 변경
2.교각보강 (단면확대)	25-24-12	㎥	413.80	417.30	3.50	- 실 시공물량 정산반영
3.교각보수	단면보수 (T=120mm)	㎡	52.34	74.17	21.83	- 실 시공물량 정산반영
	단면보수 (T=60mm)	㎡	110.29	82.50	-27.79
	균열보수	m	69.00	13.80	-55.20
	표면보수	㎡	28.83	25.44	-3.39
4.구조물깨기	철근,인력, T=500mm	㎥	6.00	0	-6.00	- 실 시공물량 정산반영
5.부대공	배수시설 해체 및 설치	개소	4	6	2	- 실 시공물량 정산반영

□ 공사비 증․감 내역

○ 전체(총괄)

(단위:원)

구 분	******	*****	*********	비고
총공사비	*************	*************	**************
도 급 비	*************	*************	**************
관 급 비	***********	***********	**************
이 전 비	**********	**********	**************

○ 금회(3차 2회 변경)

(단위:원)

구 분	******	*****	*********	비고
총공사비	*************	*************	**************
도 급 비	*************	*************	감*************
관 급 비	**********	**********	**************
이 전 비	*********	*********	증*************

○ 차수별 현황

(단위:원)

구 분	총 차	1차(2018년)	2차(2019년)	3차(금회)
총공사비	*************	*************	*************	*************
도 급 비	*************	*************	*************	*************
관 급 비	***********	***********	************	**********
이 전 비	**********	*********	*********	*********

다. 건설사업관리단 검토의견

□ 금회 설계변경은 실정보고 및 시공 수량 정산 등에 대한 설계변경 사항으로 설계변경 도서는 관련 기준에 적합하게 작성되었으며,

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 규정에 따라 적정하게 이루어졌으므로 검토내용과 같이 설계변경 시행이 타당함.

Ⅳ		조치 의견

□ 건설사업관리단에서 제출한 설계변경 검토의견서에 대해 적정한 것으로 판단되므로 설계변경(정산)을 시행하고자 함.

첨부  1. 건설사업관리단 설계변경(총괄4회 및 3차 2회) 검토보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약금액 검증확인서 1부.   끝.