문서번호	시설관리과-12275
결재일자	2021. 7. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
이재덕	나동안	김근태	07/26 박창석
협 조
	급수운영팀장		代전동근
	주무관		최지훈
	주무관		代권혜진

2021년 중블록 유량계 및 전송반 설치 계획
ㅁ

2021. 7.

강남수도사업소

(시설관리과)

2021년 중블록 유량계 및 전송반 설치 계획

상수도 관망 최적화 운영을 위해 중블록 재구축 사업과 연계하여 2021년 중블록 유량계 및 전송반 설치 계획을 보고합니다.

추진근거

2020년 중블록 유량계 설치계획[배수과-9369호(2020.10.7.)]

사업개요

사 업 명 : 중블록 유량계 및 전송반 구매 설치

사업기간 : 2021. 8. 1. ~ 2021. 12. 14.

유량계실(구조물)	유량계실 내부
	건식(외부 부착식)	습식(내부 삽입식)

사업내용

토목분야(유량계실 설치 및 굴착, 복구 등)	기전분야(유량계, 전원공급, 통신망 구축 등)
유량계실 설치(폭3000×길이3000×높이2000)	유량계, 전송반 설치
집수정 크기(폭400×길이400×높이400)	한전전원, KT통신 케이블인입 전기공사
유량계실 내부(벽면,바닥) 방수타일 시공	배수펌프, 체크밸브, 사다리, 압력계 설치
전선관로, 배수관로 굴착공사	전송반PLC작업 및 중앙제어실 통신망 구축
배수관 50mm스텐파이프 하수로 연결	상수도본부 유량감시시스템 DB망 구축

사업대상 : 중블록 유량계 및 전송반 3개소

구분	중블록명	주소	관경	관재질	비고
1	서초3	강남구 개포동647	1200	주철관
2	반포4-1	서초구 잠원동 49-35	700	주철관
3	반포4-2	강남구 신사동501-5	600	주철관

추진일정

구청, 한전, KT 유관기관 공사협의 : ‘21. 7.

조달구매 및 설치공사 계약의뢰 : ‘20. 7.

계약체결 및 사업시행 : ‘21. 8. ~ ’21. 10.

사업완료 및 준공검수 : ‘21. 11.

추진계획

유량계실 설치 : 급수운영과 시설물 연간단가 작업지시

전기공사 : 기전팀 전기 연간단가 작업지시

유량계 및 전송반 구매 : ***********************

유량계 및 기타설비 설치공사 : *****************

소요예산 : *************

**********************************

******************************

****************************************

예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치,시설비및부대비, 시설비

(중블록별 무단수 급수체계 구축)

행정사항

조달구매 및 설치공사 계약의뢰 : 행정지원과

전기사용 신청 및 전기시설 부담금 납부(한전)

통신 전용회선 신청 및 모뎀설치 부담금 납부(KT)

유량계실 설치 시, 전선·배수관로 매설도 동시에 진행하도록 굴착 승인요청

- 유량계실 설치 및 전선·배수관로 매설 야간작업 시 현장입회

- 야간작업 현장입회에 따른 대체휴무(초과근무) 실시

붙임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 조달단가내역서 1부.

3. 중블록유량계 현장위치도 1부.  끝.