투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(자전거정책과장)
(경유)
제목	시설물 관리사무위임(인수인계) 완료 통보 [청계천로 자전거 전용도로 설치공사]

1. 관련근거

가. 토목부-13343(2021. 7.12.) “공사완료 및 시설물 관리사무 위임”

나. 토목부-14000(2021. 7.20.) “시설물 관리사무 위임기관 변경(확정) 통보”

2. 위와 관련 우리시(본부)에서 시행한「청계천로 자전거 전용도로 설치공사」시설물 관리사무위임(인수인계)를 완료하였음을 알려드립니다.

□ 공사완료 및 시설물 관리사무 위임 개요

○ 2021. 5.27. : 예비준공검사 및 시설물 관리기관 협의

[자전거정책과, 하천관리과(서울시설공단), 서부·북도·성동 도로사업소, 종로·중구·성동·동대문구]

○ 2021. 6. 30. : 유지관리부서 지적사항 조치

○ 2021. 6. 30. : 시설공사 준공

○ 2021. 7.  6. : 준공검사

○ 2021. 7. 12. : 시설물 관리사무 위임(시설물 인수인계)

○ 2021. 7. 20. : 시설물 관리사무 기관(부서) 변경(확정)

○ 2021. 7. 23. : 유지관리부서 준공도서 인수인계 완료

붙임  시설물 관리기관(부서) 준공도서 인계인수증 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	남만조		도시고속도로과장	김동현		토목부장	07/26 임춘근
협조자
시행	토목부-14403	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어 플레이스빌딩12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)