문서번호	기반시설과-4986
결재일자	2021. 7. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
정창수	라철흠	07/26 代최연호
협 조

(양화대교 남단 승강기 개선)

용역결과 및 사업추진 계획

2021. 07.

한강사업본부

(시  설  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

양화대교 남단 승강기 개선 용역결과 및 사업추진 계획

양화대교 남단 상·하류에 설치된 경사형 승강기의 개선을 위한 기본 및 실시설계를 실시하고 그 용역결과 및 사업추진 계획에 대한 보고드림

Ⅰ		사업개요

□  사 업 명 : 양화대교 남단 승강기 개선 공사

□  대 상 지 : 영등포구 양화대교 남단 상·하류

□  규    모 : 경사형 승강기 2기 철거 및 수직형 승강기 2기 신설

□  사업기간 : 2021. 08. ~ 2022. 12

□  총공사비 : 2,610백만원(설계비: 120, 공사비:2,490)

Ⅱ		용역결과

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 양화대교 남단 승강기 개선 기본 및 실시설계

○ 대 상 지 : 양화대교 남단 상·하류

○ 과업내용 : 경사형 승강기 2기 철거 후 수직형 승강기 2기 신설

○ 용역기간 : 2020. 12. 4. ~ 2021. 12. 30

○ 계약금액 : 120,640천원

○ 계약상대자 : ㈜서경기술공사

□ 용역 추진경위

○ '20. 12. 04. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ '21. 03. 25. : 서울시 공공디자인진흥위원회 심의(재심의)

○ '21. 05. 25. : 1차 기술자문회의

○ '21. 06. 30. : 2차 기술자문회의

○ '21. 07. 22. : 공종분리위원회 개최

□ 용역결과

○ 설계 주요내용

- 승강기계획

· 디자인 심의결과를 반영하여 노출콘크리트로 설계함.

· 한강주변 자전거 이용 고객의 편의를 고려하여 21인승 적용

- 1차 기술자문회의

· 한강 유수저항단면 축소를 위해 계단폭 2m를 1.5m로 축소

· 접합유리 사용 및 캐노피 크기 확보

- 2차 기술자문회의

· 기존 경사형 승강기 말뚝 제거가 불가하여 최대한 활용하도록 기초를 계획하였으며 말뚝 연결을 위한 상세도 추가함.

○ 설계결과 사업비 내역

(단위:천원)

구 분	사업비	토목	전기	계측관리	폐기물처리	설계용역
합 계	2,610,00	2,257,316	167,440	28,300	36,344	120,640

Ⅲ		예산현황

(단위:천원)

구 분	예산확보액	설계금액	과부족액	비 고
합 계	610,000	2,610,000	-2,000,000
토 목		2,321,920
전 기		167,440		승강기시설
설 계		120,640

□ 설계된 공사비 2,610백만원이나 확보된 사업비는 610백만원으로 2,000백만원이 부족한 상황임

Ⅳ		조치계획

□ 발주방법 : 장기계속공사

- 확보예산 부족으로 당해 회계연도 내 추진이 불가함에 원활한 공사추진을 위하여 장기계속 공사로  발주필요

□ 예산 확보방법

- 공사발주후 낙찰잔액 일부 활용하고 추가 부족예산은 ‘22년 예산반영추진

Ⅴ		향후일정

□ ’21.07. : 공사발주(토목, 계측, 폐기물)

□ ’21.08. : 공사계약 및 착공(토목, 계측, 폐기물)

□ ’21.08. : 경사형 승강기 철거

□ ’22.12. : 승강기 설치 및 공사완료.

붙임: 공사설명서 및 설계내역서1부. 끝.