문서번호	기술심사담당관-11804
결재일자	2021. 7. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비심사팀장	기술심사담당관
윤희태		안계훈	07/27 안대희
협 조

5호선 신호시스템 개량 실시설계 설계경제성 검토(VE) 실행계획

2021. 7.

기술심사담당관

- 5호선 신호시스템 개량 실시설계 -

설계경제성 검토(VE) 실행계획

「5호선 신호시스템 개량 실시설계 용역」에 대해 설계경제성 검토 소위원회를 구성하고, 설계경제성(VE) 검토를 추진하고자 함

1		추진 근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ 설계경제성 검토 운영계획(행정부시장 방침 제6호, 2021.1.14.)

□ 설계경제성 검토 요청(서울교통공사 신호2사업소-4973, ’21.7.26.)

2		검토 요청 개요

**************************************

*******************************************************

************************************************

*******************************************

***********************************

*******************

3		운영협의회 협의결과

□ 운영협의회 검토회의 개요

○ 검토일시 : ’21.7.27(화) 11:00

○ 검토위원 : 기술심사담당관(위원장), 설비심사팀장(간사)

기술지원팀장, 건축심사팀장(위원)

□ 검토결과

○ 회의일시 : ’21.7.27.(화) 11시

○ 검토내용

-「건설기술진흥법 시행령」에 의거한 설계경제성(VE) 검토 대상사업(총공사비 100억원 이상)이므로 검토함이 타당함

□ 운영협의회 협의결과 : 기술심사담당관 대행

4		설계 경제성검토 계획

□ 주요 검토내용

○ 공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 추진방법 : 설계경제성검토 소위원회 구성 및 설계경제성 검토

○ 설계경제성검토 소위원회, 발주부서, 설계사 등 20명 내외 참여

구 분	구 성 원	역 할
총 괄	▸위원장 안대희 기술심사담당관 ▸간 사 안계훈 설비심사팀장 ▸설계VE 담당 윤희태 주무관	․ 설계VE 계획, 회의 지원 등
리 더	******************	․ 워크숍 준비, 진행 ․ 결과보고서 작성
진행보조요원	********************	․ 워크숍 준비, 보조 ․ 결과보고서 작성보조
외부 검토위원 (5개 분야)	******************************** ********************************** **************************** *****************************	․ 기능 분석 ․ 기술 검토 ․ 아이디어 제안 ․ 아이디어 평가 ․ 제안서 작성
발주부서	********************	․ 사업설명, 제안서 검토
설계자	*************************	․ 사업설명회 준비 ․ 제안서 원가분석 등

□ 설계VE 검토 세부일정

일 시	내 용
’21. 08. 04.(수) 10:00~17:00 (워크숍 1차)	- 사업설명 및 질의응답, 기능분석, 현장답사
’21. 08. 06.(금) 10:00~17:00 (워크숍 2차)	- 검토회의 : 성능평가, 아이디어 창출 및 개략평가
’21. 08. 13.(금) 10:00~17:00 (워크숍 3차)	- 검토회의 : 구체화검토 및 발표, 아이디어 평가, 대안선정
’21. 08. 18.(수)	- VE 제안서 통보(채택여부 요청) (기술심사담당관 ⇒ 서울교통공사)
’21. 08. 24.(화)	- VE 제안 채택결과 회신 (서울교통공사 ⇒ 기술심사담당관)
’21. 08. 31.(화)	- 설계경제성 심사(VE) 결과 통보 (기술심사담당관 ⇒ 서울교통공사)

4		소요 예산

********************************

**********************

********************************************

**************************************************

*********************************************

***********************************************************

**********************

□ 지급부서

○ 위원  수당 : 요청부서(서울교통공사 신호2사업소)

○ 회의운영비 : 기술심사담당관

5		향후 계획

□ 설계경제성(VE) 검토결과서 통보(’8월 말)

붙   임 : 1. 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2. 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.