문서번호	보건의료정책과-33547
결재일자	2021. 7. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		보건정책팀장	보건의료정책과장
이미선		이응창	전결 07/28 윤보영
협조

-2020년 보건소 건강관리환경조성-

구로구 사업계획변경 요청 검토 보고

2021. 7.

시민건강국

(보건의료정책과)

-2020년 보건소 건강관리환경조성-

구로구 사업계획변경 요청 검토 보고

2020년 보건소 건강관리환경조성 공모사업에 선정된 구로구의 사업계획변경 요청건에 대하여 검토 보고함

Ⅰ		추진경과

▢ ’20.6.25.: 보건소 건강관리환경조성 계획 수립(시민건강국장 방침)

- 시민건강관리센터 미조성 5개구를 대상으로 공모하여 2~3개구 지원

- 자치구당 70,000천원 내외 지원(규모감안 차등 지원)

* 2013년 공사비 가이드라인(리모델링비) 기준 준용

- 공간 재배치 없이 현재의 기능을 유지하면서 서비스 디자인 적용

▢ ’20.6.30~7.17.: 보건소 건강관리환경조성 사업신청서 제출

- 2개구(*******) 제출

▢ ’20.8.10.: 2020년 보건소 건강관리환경조성사업 자치구 선정

- 2개구(*******) 선정

▢ ’20.8.28.: 보건소 건강관리환경조성 서비스디자인 착수보고회

- ****************************

- ***********************************************************************************

▢ ’20.9.2.: 2020년 보건소 건강관리환경(시민건강관리센터)조성 사업 확정내시 결정 및 통보

- 중  구 : **********************

- 구로구 : **********************

▢ ’20.10.6.: 2020년 보건소 건강관리환경(시민건강관리센터)조성 시비보조금 교부

- ***************************************

▢ ’20.10.16.: 구로구 사업계획 변경 및 ****** 요청 및 검토승인

- 변경 내용: **********************

- 이유: ********************************************************************

***************************************************************

- *****************************************

▢ ’21.7.26.: 구로구 사업계획 변경 요청

- 변경 내용: 1층 및 3층 공간 조성 변경 및 사업기간 변경

- 이유: ********************************************************************************

Ⅱ		구로구 사업계획 변경사항

▢ 변경개요

구  분

변경전

변경후

사업명

서비스 디자인을 적용한 보건소 건강관리환경조성 사업

사업기간

2020. 10. ~  2021. 5

2020. 10. ~  2021. 12

사업위치

보건소 1층

보건소 1층

사업내용

보건소 1층과 3층 공간 재배치

현재	1층 : 내과, 대사관리센터, 예방접종실, 모성실, 약품창고 3층 : 검진실, 채혈실
⇩
재배치후	1층 : 내과, 대사관리센터, 채혈실(화장실 포함) 3층 : 예방접종실, 모성실, 약품창고

보건소 1층 공간 재배치

현재	1층 : 내과, 대사관리센터, 예방접종실, 모성실, 약품창고 3층 : 검진실, 채혈실
⇩
변경	1층 : 내과, 대사관리센터, 간이채혈실, 예방접종실, 약품창고 3층 : 공사없이 모성실만 이동 (채혈실, 검진실, 모성실)

도면

조성면적

******

******

Ⅲ		검토결과

□ 건강관리환경조성을 위한 사업공간 구성에는 변화가 없으므로 구로구에서 요청한 사업계획 변경 ***

Ⅳ		추후계획

□ ’21.7.: 사업계획 변경 검토결과 통보

붙임  사업변경신청서(구로구) 등 1부.  끝.