문서번호	기전과-8350
결재일자	2021. 7. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이규하		이지영	07/28 代박신범
협조

『2021년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

작업지시 3차 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.7.28.(수)

동부도로사업소

(기전과)

『2021년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

작업지시 3차 계획 보고

우리사업소에서 관리하는 교통안전시설물 2구역(송파, 강동)의 유지관리 및 경찰청 규제사항 이행을 위하여 아래와 같이 작업지시(3차)하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		교통안전시설물 현황(2구역)

2021.1.1현재

시설물명	계	제어기 (대)	지주 (본)	신호등 (조)	잔여시간 표시기(개)	음향신호기 (대)	보행자작동 신호기(개소)
합계	14,298	442	3,219	6,970	1,831	1,764	72
송파	8,014	251	1,806	3,896	1,042	983	36
강동	6,284	191	1,413	3,074	789	781	36

2		사업개요

공 사 명: 2021년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

공사개요: 송파구, 강동구 교통신호기 유지보수

계약업체: 백상건설 주식회사 대표 정홍훈

계약기간: 2021.3.17.(수) ~ 12.31.(금)

계약금액: 금462,280,400원(금사억육천이백이십팔만사백원)

감리업체: ㈜협우지여엔지니어링 대표 김영곤

3		작업지시 계획

작업차수: 3차

작업기간: 작업지시일로부터 ~ 2021.9.30.(목)

산출금액: 금47,124,000원(금사천칠백일십이만사천원)

작업지시 내역

연번	관련근거	작업위치	작업내용	비고
1	교통관리과-9817(2021.5.12.)	송파구 잠실동 39	유턴전용신호 신설 1대	잠실3사거리
2	신호운영실(2021.5.31.)	송파구 오금동 160	음향신호기 교체 1대	거여동사거리
3	경정비순찰	백제고분로 144번지	긴급출동보수(야간) 1회	잠실공원
4	송파교통센터(2021.5.31)	송파구 잠실동 260	긴급출동보수(야간) 1회	아시아선수촌아파트교차로
5	경정비순찰	강동구 고덕동 495	잔여시간표시기 신설 4조	고덕119안전센터
6	신호운영실(2021.6.4.)	송파구 성내천로 103	긴급출동보수(주간) 1회	성내4교 교차로
7	신호운영실(2021.6.4.)	송파구 동남로 423	긴급출동보수(주간) 1회	선일농원교차로
8	응답소(20210604905716)	송파구 마천동 52-3	신호지주 교체 1본, 노란차량신호등 교체 1식	마천2동청암양노원
9	응답소(20210603803863)	풍산동 218-34	보행자작동신호기 이설 1개	황산IC(천호철강)
10	응답소(20210610806899)	송파구 올림픽로45길 11	음향신호기 교체 2대	올림픽대교남단(극동아파트)
11	신호운영실(2021.6.4.)	송파구 잠실동 10-2	긴급출동보수(야간) 1회	종합운동장교차로
12	신호운영실(2021.6.14.)	송파구 문정로 255	긴급출동보수(주간) 1회	송학빌딩교차로
13	응답소(20210615902494)	강동구 성내동 504-2	음향신호기 교체 1대	풍납사거리
14	신호운영실(2021.5.31.)	강동구 상암로 297	음향신호기 교체 1대, 긴급출동보수(주간) 1회	대명초교입구교차로
15	신호운영실(2021.6.18.)	송파구 송파동 188-5	음향신호기 교체 1대	신가초교
16	신호운영실(2021.6.21)	강동구 상일동 491	음향신호기 교체 1대	고덕아르테온301동
17	신호운영실(2021.6.18)	송파구 마천동 597	긴급출동보수(주간) 1회	마천동교회
18	응답소(20210621903575)	송파구 오금동 75-4	음향신호기 교체 1대	오금근린공원교차로
19	신호운영실(2021.6.23.)	송파구 충민로 120	음향신호기 교체 1대	파인타운5단지교차로
20	송파경찰서(2021.6.23.)	송파구 장지동 839-3	교통신호제어기 교체 1대	아이코리아
21	신호운영실(2021.6.24)	송파구 잠실동 268	긴급출동보수(야간) 1회	잠전초등학교교차로
22	응답소(20210625805446)	송파구 오금로 477	보행신호등(1면3색) 교체 1대	영풍초교 교차로
23	신호운영실(2021.6.28)	송파구 장지동 899-1	긴급출동보수(주간) 1식	송례초등학교입구
24	신호운영실(2021.6.27)	강동구 명일동 46	음향신호기 교체 2대	고덕역교차로
25	신호운영실(2021.6.27.)	강동구 상암로 26	음향신호기 교체 1대	암사2동주민센터교차로
26	신호운영실(2021.6.27.)	송파구 신천동 16	긴급출동보수(주간) 1식	송파구청교차로
27	응답소(*************)	강동구 아리수로94길 19	잔여시간표시기 설치 2대	강일리버파크 정문 앞
28	신호운영실(2021.6.30)	강동구 고덕로 421	음향신호기 교체 1대	강명초교사거리교차로
29	신호운영실(2021.7.1.)	송파구 신천동 20-3	음향신호기 교체 1대	진주아파트
30	응답소(20210630903383)	송파구 문정동 176	음향신호기 교체 2대	문정시영아파트교차로

연번	관련근거	작업위치	작업내용	비고
31	신호운영실(2021.7.3.), 경정비순찰	강동구 암사동 541	긴급출동보수(주간) 1회	국민은행암사교차로
32	경정비순찰	송파구 문정동 3	음향신호기 교체 1대	문정초교
33	신호운영실(2021.7.4.)	하남시 감일남로 79-1	긴급출동보수(주간) 1회	감일동교차로
34	경정비순찰	송파구 잠실동 350	보행신호등(1면3색) 교체 1대	잠실우성4차아파트
35	신호운영실(2021.7.6.)	송파구 오금동 121-7	음향신호기 교체 3대	오금동사거리
36	신호운영실(2021.7.8.)	송파구 문정동 388-10	긴급출동보수(주간) 1회	동부구치소앞
37	경정비순찰	송파구 오금동 121-11	음향신호기 압버튼 교체 1대	성내5교 교차로
38	신호운영실(2021.5.17.)	강동구 강일동 693	음향신호기 교체 1대	강일6.8단지
39	신호운영실(2021.5.5.)	송파구 오금로203	긴급출동보수(주간) 1회	백제고분사거리
40	신호운영실(2021.6.4.)	강동구 고덕동 317-24	음향신호기 교체 1대	삼익그린아파트

작업완료보고서 제출기한 : 2021.9.30.(목)

4		행정사항

작업지시 내용을『2021년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』시공업체 및 감리업체에 발송하여 기한내 완료토록 지시

시공물량은 작업완료 보고서에 따라 설계변경 및 정산처리

붙 임 1. 작업지시 설계서(3차) 1부.

2. 설계도면(별첨) 1부.  끝.