투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰(탄천물재생센터 총인처리시설 기계공사 총차1회 2차 1회))

1. 설비부-00000(2021. 7. 23.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 「탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사」와 관련하여 아래와 같이 설계변경 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

나. 계 약 자: ㈜ 이수에이치앤씨 외 2개사

다. 계약변경 내용

구분	당초		변경		비고
	총차	2차	총차	2차
계약금액	1,837,280,000원	1,473,562,190원	2,095,411,570원	1,731,693,760원
공사기간	2021. 7. 31.	2021. 7. 31.	변경사항 없음	변경사항 없음

라. 변경사유: 인수기관 요청사항 반영 및 ESC 반영 등

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차, 2차) 각 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	나경운		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	07/23 代여인웅
협조자
시행	설비부-10499	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)