투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰[장월교 개축공사 실시설계용역 건설사업관리(설계감리)용역]

1. 시설보수과-5918(2021.7.22.)호 『장월교 개축공사 실시설계용역외 1건 준공기한 연기 검토 보고』와 관련입니다.

2. 아래와 같이 『장월교 개축공사 실시설계용역 건설사업관리(설계감리)용역』에 대해 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 장월교 개축공사 실시설계용역 건설사업관리(설계감리) 용역

나. 용역기간 : 2020. 11. 23. ~ 2021. 7. 31.

다. 용 역 비 : 금61,369,,000원

라. 용역개요 : 설계감리 1식

마. 계 약 자 : 에이스톤엔지니어링㈜ 대표자 이영순

바. 연기사유 : 소규모 지하안전영향 평가 용역 지반조사 결과 반영을 위한 건설사업관리 과업기간 부족

사. 변경내용

- 금액변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
용 역 비	61,369,000	61,369,000	없음

- 준공기한 연기

․ 당초 : 2020.11.23. ~ 2021.07.31., · 변경 : 2020.11.23. ~ 2021.08.30.

․ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

․ 지체상금 부과여부 : 미부과

아. 예산과목 :

- 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 장월교 개축공사, 시설비 및 부대비, 감리비.

[NO.5, 18,411,000원] 사고이월

붙임 : 관련서류 일체 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	오광준		시설보수과장	07/23 이화신
협조자
시행	시설보수과-5928	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-944-5450	/전송	02-945-5073	/	okwjun@seoul.go.kr	/	대시민공개