투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연장을 위한 변경 계약 의뢰(잠수교북단 지하차도 침수감지장치 제작구매 설치)

1. 기전과-7947호(2021.7.26.) 관련입니다.

2. 준공기한 연장을 위해 아래와 같이 변경 계약을 의뢰하오니 차리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명: 잠수교북단 지하차도 침수감지장치 제작구매 설치

나. 계약업체: 주식회사 오픈제어시스템

다. 계 약 일: 2021. 6. 16.

라. 변경내역

준공기한		변경 사유	비 고
당 초	변 경
2021.6.16. ~ 2021.7.26.	2021.6.16. ~ 2021.8.30.	모뎀개통 지연으로 인한 준공기한 연장	-

마. 계약금액: 금14,990,000원(금일천사백구십구만원)

바. 귀책사유: 서울특별시(서부도로사업소)

사. 지체상금 부과 여부: 미부과

아. 예산과목: 기전과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 지하차도 노후배수시설 개량, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 납품기한 연장 검토보고 1부.

2. 합의각서 1부.
3. 당초 계약서(납품요구서) 1부.  끝.

	기전과장
★주무관	곽영두		기전과장	07/26 代정영술
협조자	주무관	이숙영
시행	기전과-7948	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8405	/전송	02-300-8410	/	youngdoo@seoul.go.kr	/	부분공개(3,5)