문서번호	토목부-14434
결재일자	2021. 7. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		代황윤기	07/26 임춘근
협조

설계변경(전체 4회, 4차 1회) 검토 보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) 건설폐기물 처리용역 -

2021.07.

도시기반시설본부

토목부

설계변경(전체 4회, 4차 1회) 검토 보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) 건설폐기물 처리용역 -

동부간선도로 확장공사(1공구) 준공에 따라 마들로 우회도로 개설에 따른 건설폐기물 처리 물량 등을 변경(정산)하고자 검토 후 보고드림.

※ 관련근거 : 도화(감리) 2021-9988호(2021.07.21.)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 동부간선도로 확장공사(1공구) 건설폐기물 처리용역

○ 용역규모 : 폐콘크리트 31,468톤, 폐아스콘 10,406톤,

혼합폐기물 18,625톤

○ 용역기간 : ‘17.12.13. ~ ‘21.07.31.(4차 ‘21.01. ~ ‘21.07.)

○ 용 역 사 : 인선이엔티(주)

□ 설계변경 및 주요내용

○ 변경(전체 4회, 4차 1회) 현황                     (금액 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증·감(△)	비고
전체 4회	도 급 액	2,124,330	2,080,493	△)43,837
	용역기간	2017.12.13. ~ 2021.07.31.	2017.12.13. ~ 2021.07.31.	-
4차 1회	도 급 액	442,093	442,093	△)43,837
	용역기간	2021.02.20. ~ 2021.07.31.	2021.02.20. ~ 2021.07.31.	-

○ 설계변경 사유

- 마들로 우회도로 개설 및 수량 정산(도기본-19-5570호, ‘19.05.20.)

○ 공사비 증·감 현황

- 전체 4회 변경 현황                                  (금액 : 천원)

구 분	금 액(천 원)			비 고
	당 초	변 경	증 · 감(△)
1. 폐기물운반	309,729	308,820	△909
2. 폐기물처리	1,556,427	1,517,211	△39,216
3. 일반관리비	30,973	30,882	△91
4. 이윤	34,081	34,445	364
5. 부가세 등	193,120	189,135	△3,985
합계	2,124,330	2,080,493	△43,837

- 4차 1회 변경 현황                                  (금액 : 천원)

구 분	금 액(천 원)			비 고
	당 초	변 경	증 · 감(△)
1. 폐기물운반	78,432	77,969	△463
2. 폐기물처리	306,965	267,750	△39,215
3. 일반관리비	7,843	7,797	△46
4. 이윤	8,662	8,536	△126
5. 부가세 등	40,190	36,205	△3,985
합계	442,093	398,256	△43,837

○ 감리단 검토의견

- 상기와 같이 검토한 결과 변경 설계도서가 적정하게 작성되었다고 판단됨.

□ 조치계획

○ 감리단 검토 의견이 타당하여 설계변경을 통하여 폐기물 처리물량에 대하여 변경 및 정산하고자 함.

붙임  감리단 검토 의견서 및 내역서 각 1부.  끝.