“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행 〔2020년 관악구, 금천구 관내 상수도(급수,시설물)공사 건설폐기물처리용역-2회, 최종〕

우리사업소에서 시행중인「2020년 관악구, 금천구 관내 상수도(급수,시설물)공사 건설폐기물 처리용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회,최종)을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2020년 관악구, 금천구 관내 상수도(급수,시설물)공사 건설폐기물 처리용역

나. 용역개요

1) 당초 : 폐아스팔트처리 1,673ton, 폐콘크리트처리 2,808ton

2) 변경 : 폐아스팔트처리 1,372ton, 폐콘크리트처리 1,954ton

다. 용역기간 : 2020. 3. 16. ~ 2021. 7. 30.

라. 계 약 자 : 차리환경개발(주) 대표 박창홍, 박재영

마. 설계변경 금액내용                                                  (단위 : 원)

구 분	금액(원)		증 · 감	비 고
	당초	변경
총 부기금액	145,891,480	108,396,200	감37,495,280
1차부기금액	59,622,200	59,622,200
2차부기금액	86,269,280	48,774,000	감37,495,280

바. 설계변경 사유 : 성상별 물량 증·감 사항 발생

사. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(장기사용배급수관정비)

붙임 1. 설계변경 사전심의 결과보고서 및 심의의결서 각 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 공사별 담당자확인 내역 1부.

4. 공사별 건설폐기물처리내역(올바로시스템) 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

주무관	오규형		급수운영팀장	서규석		급수운영과장	이용구		남부수도사업소장	07/27 代홍기관
협조자	주무관	김윤환		행정지원과장	홍기관
시행	급수운영과-12407	(		)	접수		(		)
우	04515	동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4576	/전송	02-3146-4589	/	okh0590@seoul.go.kr	/	부분공개(5)