문서번호	도시철도계획부-6070
결재일자	2021. 7. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시철도설계과장	도시철도계획부장
이민호		강명석	07/27 정대현
협조

서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 교통영향평가용역 시행 계획

2021. 7

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

서울도시철도 9호선 4단계 연장사업

교통영향평가용역 시행 계획

도시철도 9호선 4단계 연장사업에 대한 사업계획 승인 신청 등 원활한 사업 추진을 위하여 교통영향평가 용역을 시행코자 함.

1		사 업 개 요

○ 위    치 : 중앙보훈병원 ~ 고덕역(5호선) ~ 고덕강일1지구

○ 규    모 : 연장 4.1km, 정거장 4개소

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2028년

○ 총사업비 : 6,408억원

2		추 진 경 위

○ '20. 4. : 기본계획 승인(국토교통부)

○ '20.12. : 입찰공고(조달청)

○ '21. 7. : 2공구 실시설계적격자 선정, 현재

- 2공구 실시설계적격자 선정 및 실시설계 착수(~'22.3.11)

- 1, 3공구 기본설계 중(~'21.10.20)

3		용역 시행계획

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 교통영향평가 용역

**********************

******************************************

********************

□ 주요 과업내용

○ 교통영향평가서 작성

- 교통현황 조사 분석 및 토지이용실태 분석

- 사업시행에 따른 교통영향 문제점 및 개선방안

- 교통개선대책 수립 및 효과 분석 등

○ 관계기관 협의 및 교통영향평가 심의 등 절차 이행

○ 타 사업 및 타 법령과의 관계 검토

○ 필요시 주민설명회 등 자료 작성 및 지원

○ 자료 보완 등

※ 공사 중 교통처리대책 제외

*****************************

***********************

**************************************

**********

**********************************************************************

********************************************************************************

***********************************************

************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**************************************************

******************************************************

4		행 정 사 항

*********************

○ 예산과목(도시철도건설사업비특별회계)

- 도시철도 건설, 도시철도 건설사업, 도시철도 9호선 4단계 건설, 시설비 및 부대비, 시설비(201-401-01)

※ 소요예산은 기술용역타당성 심사 및 낙찰하한율에 의해 조정될 수 있음

5		향 후 계 획

○ '21. 7. : 기술용역타당성 심사(기술심사담당관)

○ '21.  8. : 용역 발주 및 계약, 착수

○ '21.  6. : 용역 준공

붙임  1. 과업내용서(안) 1부.

2. 설계내역서(안) 1부.  끝.