문서번호	도시철도설비부-7080
결재일자	2021. 7. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		차량과장	도시철도설비부장
이은석		강치석	07/28 김중영
협 조
	송변전과장			전계목
	주무관			박종석

「별내선(8호선연장) 건설사업 시스템분야 책임감리용역」

체계공학 감리원 배치계획 변경 검토보고

2021. 07.

도시철도설비부

( 차 량 과 )

「별내선(8호선 연장) 건설사업 시스템분야 책임감리용역」

체계공학 감리원 배치계획 변경 검토보고

「별내선(8호선 연장) 건설사업 시스템분야 책임감리용역」과 관련하여 체계공학 분야 감리원 배치계획 변경 요청 건에 대해 검토하여 보고 드림

용역개요

○ 용 역 명 : 별내선(8호선 연장) 건설사업 시스템분야 책임감리용역

○ 과업위치 : 암사 ~ 별내

○ 과업범위 : 별내선 건설사업 전구간(본선, 모란차량기지)

- 연  장 12.9km, 정거장 6개소, 차량기지 증설, 종합관제실 개량

○ 계약현황 : 세종기술(주) 외 4개사 공동수급(분담이행방식)

구 분	용 역 기 간	계 약 금 액	체계공학 (25.79%)
총 차	2021.03.02. ~ 2024.02.29.	***********	***********
1 차	2021.03.02. ~ 2022.03.01.	***********	*********

감리원 배치계획 검토 배경

○ 체계공학 감리원 배치계획 변경 승인 요청(’21.07.26. 별내선시감 제21-078호)

○ 변경개요

- ’21.11월 투입 예정인 중급감리원 1명을 ’21.08.01.에 선투입하고자 함

구 분	변경 전(1차 년도)	변경 후(1차 년도)	비고(단위:인/월)
중급 감리원2	3.44(‘21.11.17 투입)	7.00(‘21.08.01 투입)	1차년도 3.56 증

※ 전체감리원 총체 투입공수는 변경 없음

구분	1차 년도(인/월)			2차 년도(인/월)			3차 년도(인/월)			총 투입(인/월)
	전	후	증감	전	후	증감	전	후	증감	전	후	증감
*******	12.0	12.0	-	12.0	12.0	-	12.0	12.0	-	36.0	36.0	-
******	-	-	-	-	-	-	6.0	6.0	-	6.0	6.0	-
*******	12.0	12.0	-	12.0	12.0	-	12.0	12.0	-	36.0	36.0	-
*******	3.44	7.0	3.56↑	12.0	8.44	3.56↓	8.90	8.90	-	24.33	24.33	-
******	1.0	1.0	-	12.0	12.0		5.3	5.3		18.3	18.3	-

○ 변경사유

- 제작 및 설치단계로 시스템 분야별 준공된 설계도서 검토 과업 증가

- 경기도 구간 감리 선정 지연으로 인터페이스 업무 중복 발생

검토결과

○ 시스템분야 통합성능 확보 및 원활한 인터페이스 업무를 위해 감리단 요청에 따라 체계공학 분야 중급감리원 1명을 3개월 선투입(’21.11월 → ’21.08월)하는 것이 적절한 것으로 사료됨

○ 단, 총차계약에 따른 체계공학 분야 감리원 전체 투입(인/월)은 변동 없음

조치계획

○ 감리원 배치계획 변경 및 투입계획 승인 통보 : ’21.07.29.

붙임 : 감리원 배치계획 변경 및 투입승인 요청 공문 1부.  끝.