문서번호	역사문화재과-14222
결재일자	2021. 7. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	문화재사업팀장	역사문화재과장
김대훈	신덕순	07/29 이희숙

딜쿠샤 주변 정비공사

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

2021. 7.

문 화 본 부

(역사문화재과)

『딜쿠샤 주변 정비공사』

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

‘딜쿠샤 주변 정비사업’ 추진과 관련 실정보고서가 접수되어 아래와 같이 검토 및 승인하고 설계변경에 따른 계약금액 조정 및 준공기한 연기를 요청하고자 함.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 딜쿠샤 주변 정비공사(건축)

□ 계 약 자 : 세림산업주식회사(대표자 배지원)

□ 계약금액 : 금255,393,900원

□ 계약기간 : 2020. 5. 7. ~ 2021. 8. 2.

□ 추진경과

’21.5.10. : 착공

’21.5.14. : 착수회의 개최

’21.6.29. : 전문가 자문회의 개최

※ 현재 문화재 관리시설 설치 및 부대공사 진행 중(공정률 90%)

Ⅱ		변경사항

******************************************************

******************************************************

*************************************************************************************

************************************************************************

구 분	계약기간	계약금액	비고
당 초	2021.5.7. ~ 2021.8.2.	금255,393,900원
****	************************	*************	************

□ 지체상금 부과여부 : 미부과(귀책소재: 서울특별시)

Ⅲ		보고자 의견

□ 실정보고서 검토 결과 설계변경 사유 및 변경금액 산정이 적정하고, 설계변경에 따른 추가 공사기간이 필요하다고 사료됨.

Ⅳ		행정사항 및 향후계획

□ 계약부서(재무과)에 계약변경 의뢰

************************************************************

*******************************************

****************************************

**************************************************

********************************************************

*************************

붙임  1. 실정보고서 및 변경내역서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 및 합의각서 각 1부.  끝.