문서번호	건축부-11836
결재일자	2021. 7. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
손남기		차무흥	07/29 신명승
협조

『서울의료원 권역응급의료센터 증축공사』

총차 및 3차공사분 계약금액 변경 검토보고

2021. 07.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『서울의료원 권역응급의료센터 증축공사』

총차 및 3차공사분 계약금액 변경 검토 보고

「서울의료원 권역응급의료센터 증축공사」관련, 건설사업관리자로부터 제출된 총차 및 3차 공사분 계약금액 변경 요청 건에 대하여 보고드림.

*************************************************

1		공사현황

○ 사업개요

- 위    치: 중랑구 신내로 156(신내동, 서울의료원)

- 규    모: 지상5층, 연면적 4,920.84㎡, 증축

- 용    도: 의료시설(종합병원)

- 계약내용

구 분	공사기간	도급금액	비고
***	*********************	**************
***	*********************	**************	*************
***	*********************	**************	*************
***	*********************	**************

- 공 정 율: 99%

○ 추진경위

- ‘19.02.11.: 공사 착수

- ‘19.12.09.: 1차공사 준공

- ‘20.01.16.: 서울의료원 응급센터 추가 증축공사 계획(안) 수립

- ‘20.03.06.: 추가증축공사(4층,5층)으로 인한 현장관리계획

- ‘21.02.08.: 건축공사(2,3차)변경계약

- `21.02.09.: 2차공사 준공

- ‘20.07.16.: 설계변경 소위원회 개최(조건부통과)

- ‘20. 7월(현재) : 마무리공사(현장정리) 중

2		계약변경 근거 및 내용

○ 관련근거

- 도시기반시설본부-19-13002(2019.11.11) - 승강기 PIT내 중간벽 설치 실정보고에 대한 회신

- 도시기반시설본부-20-86(2020.01.03) - 감염폐수조 통로 확보 실정보고 회신

- 도시기반시설본부-20-3466(2020.03.21) - PIT층, 1층(외부, 공조실) 마감재 현안사항 보고에 대한 회신

- 건축부-9596(2021.06.23.) 예비준공검사 지적사항 통보 및 조치요청

- 건축부-5806(2021.04.14.) 실정보고 승인 통보

- 도시기반시설본부-21-8755(2020.07.26.) 업무지시전(설계변경 소위원회 지적사항 조치결과 승인통보)

- 유호(서울의료원) 21-081호(2021.07.29.) “설계변경내역서(총차 및 3차)” 제출의 건

○ 계약변경 세부내용

1) 계약금액 변경

① 총차수 공사

구분	당 초(A)	변 경(B)	증 감(C=B-A)
**	*************	*************	**********
**	*************	*************	**********
**	***********	***********	**********
***	***********	***********	**********
**	*************	*************	***********

② 3차수 공사

구 분	당 초(A)	변 경(B)	증 감(C=B-A)
**	*************	*************	**********
**	***********	***********	**********
**	***********	***********	**********
***	**********	***********	**********
**	*************	*************	***********

2) 주요 설계변경 내용

가. 실정보고 내용 및 금액

연번	구분	내용	요청금액	설계변경사유	관련근거
*	***************	******************** *********** **********************	*********	**********	***************** *************
*	***************************************	*************************************************** ***********************************************************************	**********	*********	************** ************* **************** *************
*	***********************	********************************	*********	******************	******** *************
*	**************	************************ ************	**********	*********	*********** ************
*	*************************	**********************************************************************	**********	*********	*******

연번	구분	내용	요청금액	설계변경사유	관련근거
*	******** ****	************************* ******	**********	********	*********** ************
*	**********	*********************** ***********************	***********	********	******** *************
*	*********	*****************		********
*	****	***************** ******************		********
*******			**********

나. 설계변경 위원회 내용 및 금액

연번	구분	내용	요청 금액	설계변경사유	관련근거
*	******	****************** **************************** **********************	*********	********	******** *************
*	***************	***************** ************************** ****************** *************************	**********	********	******** *************
*	**********	*********** ***************************** ****************	**********	********	******** *************
*	******* *********	************** ****************************** *********************	**********	********	******** *************
*	***************	****************************** **************************************************	**********	********	******** *************
*	**************************	************************** ********************************	**********	*********	************** *************
*	***********	******************** ************************	**********	********	**************** *************
*	******** *******	****************** ********************** *************************	**********	********
******			***********

3		책임건설사업관리기술자 검토의견

*********************************************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************

************************************************

4		처리의견

○ 건설사업관리단의 검토의견과 같이 계약변경 처리하고자 함.

붙임   1. 서울의료원 권역응급의료센터 증축공사 총차 및 3차분 공사 변경계약 검토보고 1부.

2. 설계변경 내역서(총차) 1부.

3. 설계변경 내역서(3차) 1부.

4. 제비율 검증확인서 1부. 끝.