문서번호	자전거정책과-7593
결재일자	2021. 7. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	자전거정책팀장	자전거정책과장
박성훈	이기웅	07/29 배덕환

지정차로제 도입 용역기간 연장계획

2021. 7.

도시교통실

(자전거정책과)

지정차로제 도입 용역기간 연장계획

「지정차로제 도입 용역」관련하여 자전거 및 PM 통행량 등 분석 기간 추가 필요에 따라 과업기간을 연장하고자 함

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 지정차로제 도입 관련 용역

○ 계약기간 : 2021. 5. 6. ~ 2021. 8. 3.

○ 계약금액 : ************

○ 용역업체 : *******************

□ 계약 변경

○ 계약기간 연장

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	2021. 5. 6 ~ 2021. 8. 3	2021. 5. 6 ~ 2021. 9. 3	증 31일
계약금액	***********	변경 없음

※ 귀책사유가 서울시에 있어 용역업체에 지체상금 미부과

○ 연장사유

- 자전거 및 PM 통행량 데이터 추가 제공에 따른 분석기간 추가 필요로 용역기한을 연장하고자 함

□ 향후 계획

○ ’21. 7.	: 재무과 계약변경(기간연장) 의뢰

○ ’21. 9. 3.	: 용역준공

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.