문서번호	시설과-3297
결재일자	2021. 7. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원조성팀장	시설과장
정정훈		이종무	07/30 권종화
협조

- 2021년 사방시설 유지관리사업(연간단가) -

작업지시(2차) 작업기간 변경 검토보고

2021. 7.

중부공원녹지사업소

(시설과)

- 2021년 사방시설 유지관리사업(연간단가) -

작업지시(2차) 작업기간 변경 검토보고

『2021년 사방시설 유지관리사업(연간단가)』작업지시(2차) 작업기간 변경 요청이 있어 해당 사항을 검토하고 그 결과를 보고 드림.

□ 작업지시(2차) 개요

❍ 작업대상 : 남산공원 북측순환로 사방댐 2개소

❍ 작업기간 : 2021. 7. 19. ~ 7. 30.

❍ 계약업체 : ***********

❍ 시행방법 : 연간단가 계약업체로 하여금 정비토록 하고 추후 정산

□ 작업기간 변경 요청 내용

❍ 당    초 : 2021. 7. 19. ~ 7. 30.

❍ 변    경 : 2021. 7. 19. ~ 8. 20.

❍ 변경사유 : 폭염으로 인한 현장근로자 건강장해 예방

□ 보고자 의견

❍ 최근 폭염으로 인해 현장근로자의 탈진 등의 우려가 있어 기간변경 (승인)하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.  끝.