문서번호	공공개발기획단-7282
결재일자	2020.7.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공공토지팀장	공공개발추진반장
최희영	염규엽	07/16 이상면

용역 설계변경 계획 수립

(인재개발원일대 구조안전진단 용역)

2020. 7.

공공개발기획단

인재개발원일대 구조안전진단 용역 설계변경 계획 수립

************************************************************************************

1		용역 개요

□ 인재개발원일대 구조안전진단 용역

○ 사업대상 : 인재개발원일대 건축물 4개동

○ 용역기간 : ’20. 3. 25 ~ ’20. 7. 26.(4개월)

○ 계약금액 : 금 551,847,000천원

○ 과업수행자 : 주식회사 한국안전진단기술원

○ 주요 과업내용

- 인재개발원 및 (구)소방학교 내 건축물 구조안전진단

□ 추진경위

○ '18. 8.  : 인재개발원 내 소방학교 이전

○ '19. 4.  : 공공기관 이적지 활용방안 수립 시행계획 방침 수립

○ '19.11.  : 공공기관 이적지 활용 기본계획 수립 용역 착수

○ '20. 1.  : 인재개발원일대 구조안전진단 용역시행계획 방침 수립

○ '20. 3.  : 구조안전진단 용역 계약

○ '20. 6.  : 구조안전진단 용역 설계 변경 및 준공기한 연기

- 진단 대상이 코로나19 대응시설로 활용 → 구조안전진단 지연

(인재개발원 다솜관 : 격리자수용소, 소방학교 : 선별진료소)

2		설계 변경

□ 설계변경 사유

*****************************************

*************************

*****************************************************************************

*****************************

**************************************************************************

****************************************************************************

***************************************************************************

□ 설계변경 내용

○ 변경 과업내용

- 진단 대상 : (당초) 인재개발원 본관, 다솜관, 소방학교 본관, 생활관,

(변경) 인재개발원 본관, 다솜관

- 용역 기간 : (당초) ’20. 3. 25. ~ 7. 26.

(변경) ’20. 3. 25. ~ 8. 26.

○ 계약금액

- (당초) 금51,847,400원(부가가치세 포함)

- (변경) 금45,766,600원(부가가치세 포함)(감6,080,800원)

3		행정사항 및 향후일정

□ 행정사항

○ 변경계약 체결 : 기존 용역사와 변경 계약

- 주식회사 한국안전진단기술원 대표자 이윤종

○ 감액 용역비 불용 처리(금6,080,800원)

○ 예산과목 : 공공개발기획단, 도시개발의 공공성 강화, 도시발전 및 공공개발(도시개발), 토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여 프로그램 운영, 시설비(401-01)

□ 향후계획

○ ’20. 7 : 용역 변경계약 의뢰(재무과)

○ ’20. 8 : 용역 준공

첨부 : 1. 용역사 준공기한 변경 및 계약변경 요청 공문 각1부.

2. 변경과업내용서 1부.

3. 변경설계내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.