문서번호	설비부-10955
결재일자	2021. 8. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박근형		代유영선	08/02 김호성
협조

『율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선 정보통신공사』

관급자재(CCTV) 변경 검토보고

2021. 7.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『율곡로(창경궁앞) 도로구조개선 정보통신공사』

관급자재(CCTV) 변경 검토보고

「율곡로(창경궁앞) 도로구조개선 정보통신공사」관급자재(CCTV)에 대해 물량 증·감에 따른 변경 요청을 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

□  공 사 명 : 율곡로(창경궁앞) 도로구조개선 정보통신공사

□  위    치 : 종로구 권농동 8(창덕궁 돈화문) ~ 종로구 원남동 166

□  규    모 : 도로확장 폭 4차로 → 6차로, 연장 810m(터널 320m)

□  계약기간 : 2020.04.21. ~ 2021.08.31.

□  계약금액 : 20,680,550원

□  감 리 단 : ㈜케이씨아이 외 1사

□  시 공 사 : ㈜웨이브컴

2		관련근거

□  정보통신공사 관급자재 변경 검토보고(율곡감 제2021-220호,‘21.07.30.)

- 송수신기 및 미디어컨버터 1개 감소, 광섬유케이블 어셈블리 2개 감소

□  조달청 물품 다수공급자계약 특수조건(조달청 공고 2021-18호,’21.06.23.)

3		실정보고 내용

□  계약현황

납품요구번호	품 명	계 약 자	계약금액	납품기한
12-19-2-35042-01	CCTV 구매설치	㈜그린아이티 코리아	75*********	`21.8.31.

□ 변경내용

품명	규격	단위	변경내역		증·감
			당초	변경
하드디스크어레이	8-Hotswap Bay, 2GB, 32TB	대	1	1	-
컴퓨터서버	Intel i7, 8GB, 6TB, 4BAY	개	2	2	-
LCD패널 또는 모니터	55cm	개	2	2	-
카메라받침대	벽부형	개	6	6
광분배함	4P	개	5	5
광분배함	24P	개	1	1
송수신기 및 미디어컨버터	SFC2000-SFP	개	6	5	감) 1
광섬유케이블어셈블리	SM, 3M	개	12	10	감) 2
하드디스크드라이브	4TB	개	8	8
네트워크스위치	28Port 24Poe, 4sFP	대	1	1
네트워크스위치	UTP 8p(PoE), SFP 2p	대	2	2
네트워크스위치	UTP/SFP 4p, SFP 24p	대	1	1
상자	250×300×200mm, SUS	대	5	5
보안용카메라	1/2.8", 2.0M, 0Lux (IRLEDOn),x20,IP	대	7	7
안내판	300X200MM, 제작형	개	4	4
서지방지장치	전원용	개	5	5
서지방지장치	네트워크용, RJ-45	개	6	6
광송수신기또는 수신기	SFP-LX	개	10	10
LCD패널 또는 모니터	106cm	대	1	1
전원공급장치	8CH, Max.5A/CH	대	3	3
영상감시장치	GIT-MSVR-IPSDR20	조	1	1
구매금액		천원	75,603	75,336	감) 267

❍ 변경사유

- 현장여건에 따라 CCTV RACK 장비 접속 케이블이 광케이블에서 UTP케이블로 변경됨으로 인한 광케이블 접속자재 수량 변경

4		보고자 조치의견

□  건설사업관리단이 제출한 관급자재(CCTV) 물량 감소가 적정 하다고 판단되어 승인하고, 총무부에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.