문서번호	하천관리과-10763
결재일자	2021. 8. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하천계획팀장	하천관리과장
박계현		권혁제	08/04 손경철
협조

우이천 횡단 징검다리 설치 검토 보고

2021. 8.

물순환안전국

(하천관리과)

우이천 횡단 징검다리 설치 검토 보고

「우이천 횡단 징검다리 설치」에 따른 하천기본계획 및 수리 검토

내용을 보고 드림.

□ 사업 개요

○ 사업위치 : 도봉구 우이천 (계성교 하류부 120m지점)

○ 사업기간 : 2021. 3 ~ 12.

○ 사업내용 : 징검다리 1개소 및 연결시설(좌,우안) 설치

○ 총사업비 : 200백만원

○ 시 행 자 : 도봉구 물관리과

□ 추진경위

○ 2021. 1.     : 우이천 횡단 징검다리 공사비 예산 반영 (김광수의원 발의)

○ 2021. 3.~4. : 설계자료 및 도면 검토(시,구 합동)

○ 2021. 6. 17. : 현장 합동점검(시, 도봉구) 및 수리검토서 제출 요청

○ 2021. 7. 20. : 외부 전문가 수리검토서 자문

□ 검토내용

○ 하천기본계획 검토

- 설치지점(No118)의 계획홍수위는 32.0El.m이며, 제방고는 33.5El.m        (좌안 33.52, 우안33.62)로 제방 여유고를 1m 이상 확보하고 있어,            ******************************************

○ 제출된 수리검토서 자문

- 자문위원 : 제일엔지니어링 부사장 ***

- 자문일시 : 2021. 7. 20

- 자문내용 : 우이천 징검다리 설치에 따른 수리검토서 자문

***********

********************************************

***************************************************

***********************

- 기타사항

‧ 징검다리 높이가 서로 상이(도면 0.5m, 표0.8m)

‧ 비우기 기간에 공사를 시행하되, 우기 기간 시공 시 가물막이 시설의

수리계산 추가 필요.

‧ 징검다리 설치주변 상‧하류에 대한 종단면도 작성하여 징검다리 높이

저감 방안 강구

‧ 본 징검다리 설치 필요성과 위치선정의 적정성 검토 필요

□ 조치계획

○ 자치구(도봉구 물관리과)에 검토 및 자문결과 통보하여 보완 후 사업 시행토록

조치.

○ 자문위원 수당 지급 (150천원)

※ 예산과목 : 물순환안전국 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방 대책 사업, 풍수해 예방대책,                        일반운영비, 사무관리비

붙 임 : 1. 하천기본계획의 사업지점 홍수위 등 현황 1부.

2. 징검다리 설치에 따른 수리검토서 1부.

3. 수리검토서에 대한 자문결과 1부.  끝.