투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기의뢰(서울숲 CCTV 정비공사(2단계))

1. 시설과-2571(2021.6.8.) 및 시설과-2572(2021.6.8.), 공원운영과-7365(2021.6.14.), 공원운영과-7366(2021.6.14.)와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인 『서울숲 CCTV 정비공사(2단계)』에 소요되는 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건 명 : 서울숲 CCTV 정비공사(2단계) 관급자재 구매

나. 기존 관급자재 납품기한 변경

납품 요구번호	나라장터물 품식별번호	품 명	규 격	단 위	수 량		납품기한 (당초)	납품기한 (변경)	비 고
					기존	변경
**************** ********	************** *******	************	****************	*	*****		**********	**********	**** **
**************** **********	********** **** *******	*************	**********************	*	****		**********	**********	**** **
**************** *********	********** *** ******	****** **********	***************	*	****		**********	**********	******

다. 연기사유 : 폭염으로 인한 공사일정 지연에 따른 납품기한 연기

라. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

마. 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.

	시설과장
주무관	권정수		시설관리팀장	김대영		시설과장	08/04 박종수
협조자
시행	시설과-3804	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과(신대방동)	/
전화	02-2181-1160	/전송	02-2181-1169	/	kejes777@seoul.go.kr	/	부분공개(5)