문서번호	건축부-12023
결재일자	2021. 8. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
김송희		조승제	08/02 신명승
협조

강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사 건설사업관리용역

계약변경(1차수) 검토보고

2021. 08.

강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사 건설사업관리용역

계약변경(1차수) 검토 보고

본 공사의 공사기간을 고려한 효율적인 건설사업관리를 위하여 건설사업관리기술인의 배치시기 및 배치기간 조정(승인)에 따른 건설사업관리단의 1차수 계약금액 변경 실정보고가 제출되어 검토보고 드림

※ 1차수 : 273,947천원→312,809천원(증 38,862천원), 총 용역비 증가 없음

□ 용역개요

❍ 용 역 명: 강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사 건설사업관리용역

❍ 용역업체: ㈜건축사사무소 광장 외 1

❍ 계약금액: 금620,968,000원(총차)

❍ 용역기간: 2020.11.20.~2022.03.31.(총차)

❍ 계약현황

구분	계약금액	용역기간	비고
총차	620,968,000천원	′20.11.20.~′22.03.31.	기존
1차	273,947,000천원	′20.11.20.~′21.08.15.	기존

□ 실정보고 내용

❍ 보고현황

- 건설사업관리기술인 배치조정에 따른 변경계약 요청 광장(건설)2021-642(′21.08.02.)

❍ 관련근거

- 규정 : 용역계약일반조건 제17조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정), 기획재정부예규 제501호(′20.06.19.)

- 건축부-547(2021.01.14.) 건설사업관리기술인 배치계획(변경)승인 통보

- 설비부-3935(2021.03.25.) 건설사업관리기술인(기계)배치 승인

- 설비부-4244(2021.04.01.) 건설사업관리기술인(통신)배치 조정 및 배치승인

❍ 변경사유

- 본 공사의 예정공정을 고려한 기술인의 배치시기 및 배치조정이 기 승인됨에 따라 1차수 계약금액 변경.

□ 변경 내용

❍ 용역계약 변경

분야		계약내용		비고
		당초	변경
총차	계약금액	620,968천원	620,968천원	변경없음.
	용역기간	′20.11.20.~′22.03.31.	′20.11.20.~′22.03.31.	변경없음.
1차	계약금액	235,476천원	312,809천원	증)38,862천원
	용역기간	′20.11.20.~′21.08.15.	′20.11.20.~′21.08.15.	변경없음.

※ 건설사업기술인(조경, 기계, 전기, 통신)등 배치시기 및 배치기간 조정으로 1차수 계약금액은 증액되나, 건축분야 기술인 등급조정으로 총차 계약금액 변경 없음.

□ 처리의견

❍ 건축기술인 등급조정, 본 공사 예정공정을 고려한 조경, 기계, 전기, 통신등 배치시기 및 기간이 조정되어 승인됨에 따라 1차수 변경계약 하고자 함.

붙임	1. 건설사업관리기술인 배치계획 승인등 관련 공문 일체 1부.

2. 변경계약 요청공문·배치계획표 및 내역서 일체 1부. 끝.