문서번호	기반시설과-5205
결재일자	2021. 8. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김일문		라철흠	08/03 박상보
협조

『암사초록길 조성공사 감독권한대행 건설사업관리용역』

설계변경 검토 보고

2021. 8.  .

한강사업본부

기반시설과

『암사초록길 조성공사 감독권한대행 건설사업관리용역』

설계변경 검토 보고

『암사초록길 조성공사 감독권한대행 건설사업관리용역』의 계약금액 및 계약기간 변경에 대한 검토 보고임.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 암사초록길 조성공사 감독권한대행 건설사업관리용역

❍ 용 역 비 : 1,401,326천원

❍ 용역기간 : 2020.8.3.~2023.1.19.

❍ 용 역 사 : ㈜유신(40%),㈜다산컨설턴트(30%), ㈜경동엔지니어링(30%)

□ 설계변경 내용

❍ 관련근거

- 기반시설과-3764(2021.6.9) (물가변동 계약금액조정)

- 기반시설과-4889(2021.7.26.)- 예산 변경사용 계획(본부장방침)

- 건설사업-21-745(2021.8.2)- 계약금액조정 요청

❍ 계약금액 및 기간변경

(단위:천원)

구분	총 차			1차	2차			장 래
	당초	변경	증․감	준공완료	당초	변경	증․감
계약금액	1,401,326	1,442,626	증41,300	183,000	255,000	510,000	255,000	749,626
계약 기간	’20.8.3 ~ ’23.1.19	변경없음		’20.8.3 ~ ‘20.12.31	‘21.1.1~ ‘21.8.16	‘21.1.1~ ‘22.1.15.		~ 23.1.19

❍ 기술인 변경투입

구 분		1월	2월		3월	4월	5월	6월		7월		8월		9월	10월	11월			12월	‘22.1월
책 임 기술인	변경전
		‘21. 1.1 ~ ’21.8.16 (7.5개월)
	변경후
		‘21 1.1~ ’21.1.16 (증5개월 )
분야별 기술인	변경전 (1인)
		‘21. 1.1 ~ ’21.8.16 (7.5개월)
	변경후 (2인)
		‘21. 1.1 ~ ’22.1.16(증 5개월)

□ 설계변경 사유

❍ 감리기간 연장

본공사의 2차분 준공기한이 ’22.3월로까지로서 감리기간을 연장(’21.8.16→’22.1.15)하여 원활한 건설사업관리 업무수행

※제체상금 부과여부 : 미부과(발주처 계획변경)

❍ 계약금액

건설사업관리용역(2차분)의 감리수행기간 연장(’21.8월→’22.1월)에 따른 계약금액 조정(255→510백만원)

❍ 건설사업관리 기술인 투입조정

8월중 우회도로 완료 예정으로 본격적인 지하차도 공사가 착수됨에 따라 원활한 공사 추진을 위하여 기술인 추가투입(토목중급 1인 추가)

□ 조치의견

❍ 부족 감리비에 대하여는 4차분 공사비 감액 변경후 예산변경(시설비⇒감리비)조치하여 설계변경 반영하고

❍ 계약부서에 감리기간 및 계약금액 변경 의뢰하고자 함.

붙  임 : 1. 관련문서 각1부.

2. 변경내역서(총차 및 2차) 각1부. 끝.